문서번호	공간정보과-6937
결재일자	2017.9.22.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
김영혁		이성환	09/22 강신재
협 조
	주무관			전성호
	주무관			신정민

「2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

기성금(1회) 지급계획 보고

2017.  9.

상수도사업본부

(공간정보과)

「2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

기성금(1회) 지급계획 보고

『2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』용역 추진과 관련하여 기성금(1회) 지급계획을 보고 드림.

1		개 요

□ 2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

❍ 사업현황(측량 및 편집 총 434㎞, 3,242,300천원)

구 분	서북지역	서남지역	동남지역
용역내용	측량 및 편집 : 162㎞ (신설44km, 기존118km)	측량 및 편집 : 121㎞ (신설28km, 기존92km)	측량 및 편집 : 151㎞ (신설51km, 기존100km)
*******	***********	*********	***********
******	***********	*********	***********
용역기간	2017. 2. 23.~2018. 3. 31.
*****	********* *****************	*********** ***************	********* ******************
해 당 사업소	중부, 서부, 북부	강서, 남부	동부, 강남, 강동

❍ 기성기간 : ’17. 2. 23.~9. 22.(작업완료 물량)

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비

2		기성현황

1. ’17년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업(서북)

□ 주요공종 기성물량

공 종	현 황				비 고
	계 약		기성(1회)	잔여
	수량	단위
4급 기준점 측량	9	점	9	-
신규 상수도 시설물 측량	30	㎞	13.7	16.3
기존상수도 지하시설물(조사/탐사)	118	㎞	76.2	41.8
지하시설물도 정위치 편집	148	㎞	89.9	58.1
현지보완측량	0.2	㎢	0.2	-
최종도면 출력	223	매	143	80

□ 기성금 지출현황(1차 계약)

****	*******	***********	********	****
*************	*	***********	***********	***********

2. ’17년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업(서남)

□ 주요공종 기성물량

공 종	현 황				비 고
	계 약		기성(1회)	잔여
	수량	단위
4급 기준점 측량	7	점	7	-
신규상수도 시설물 측량	18	㎞	14.2	3.8
기존상수도 지하시설물(조사/탐사)	92	㎞	60.3	31.7
지하시설물도 정위치 편집	110	㎞	74.5	35.5
현지보완측량	0.1	㎢	0.1	-
최종도면 출력	160	매	81	79

□ 기성금 지출현황(1차 계약)

****	******	************	*******	****
***********	*	***********	***********	***********

3. ’17년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업(동남)

□ 주요공종 기성물량

공 종	현 황				비 고
	계 약		기성(1회)	잔여
	수량	단위
4급 기준점 측량	9	점	9	-
신규상수도 시설물 측량	37.5	㎞	20.7	16.8
기존상수도 지하시설물(조사/탐사)	100	㎞	60.1	39.9
지하시설물도 정위치 편집	137.5	㎞	80.8	56.7
현지보완측량	0.2	㎢	0.1	0.1
최종도면 출력	210	매	160	50

□ 기성금 지출현황(1차 계약)

****	******	************	*******	****
*************	*	***********	***********	***********

3		향 후 계 획

□ 각 용역업체의 기성물량 내역에 따라 기성검사 시행

붙임 : 1. 기성 내역서(서북, 서남, 동남) 각 1부.

2. 기성물량 산출서(서북, 서남, 동남) 각 1부.  끝.