문서번호	기전과-5181
결재일자	2017.9.22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김용문		임태수	09/22 이덕기
협조

『2017년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사』

설 계 변 경(제1차) 검 토  보 고

2017. 09.

남부도로사업소

(기   전   과)

『2017년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사』

설 계 변 경(제1차) 검 토  보 고

『2017년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)』와 관련하여, 책임감리원으로부터 설계변경 요청이 있어 아래와 같이 검토하여 보고 드림.

Ⅰ	관련근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

○ ㈜트래픽스 (TR본0932 <2017. 9. 21>) : 제1차 설계변경 요청

Ⅱ	사업개요

○ 공 사 명 : 2017년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)

○ 공사위치 : 관내(서초구, 동작구, 금천구, 관악구, 영등포 일부)

○ 공사내용 : 교통안전표지 설치 및 철거

○ 계약금액 : 80,201,300원

○ 공사기간 : 2017. 2. 28. ~ 12.29.

○ 계약업체 : 원우건설 대표 김장우

Ⅱ	설계변경 사항

○ 설계변경 사유 : 당초 단가계약 물량과 작업지시한 시공물량에 맞게 변경

○ 주요 설계변경내역

호표	품 명		규 격	단위	수 량		변경사유	비고
					당초	변경
1-4h	규격삼각▽	교체	900고휘도(반사지)	매	2	1	당초 계약물량과 현장여건의 공사물량상이에 따른 변경	세부내 역 -별첨
1-5h	규격원형	신설	600고휘도(반사지)	매	2	14
2-9h	중형원형	교체	780고휘도(반사지)	매	2	40
2-37h	중형T형부착대	신설	1매용백관	set	2	61
2-44h	중형교차로대	이설	백관	set	2	0
3-10h	문안수정	보수	고휘도(반사지)	㎡	2	0

○ 설계변경 금액 : 변경없음

구 분		당 초	변 경	증/감액	비 고
도급비	공 급 가 액	72,910,273	72,910,273	-
	부가가치세	7,291,027	7,291,027	-
	계	80,201,300	80,201,300	-

○ 책임감리원 검토의견

- 제1,2,3차 작업 지시하여 완료하는 과정에 설계물량과 실제 현장여건에 따른 공사물량 증감 차이가 발생하였으므로 설계변경이 타당하다고 사료됨

Ⅲ	검토의견

○ 책임감리원이 제출한 설계변경 요청서류를 검토한 바, 그 동안 작업 지시하여 작업완료한 사항으로 당초 단가계약 물량과 시공물량 증감사항이 적정함으로 설계변경함이 타당하다고 사료됨.

Ⅳ	향후계획

○ 2017. 9월 : 설계변경시행(1차)

○ 2017. 9월 : 1차기성 준공(금42,905천원)

○ 2017.12월 : 전체 공사준공

붙  임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 설계변경 요청서(책임감리) 1부.

3. 제비율 검증확인서 1부.   끝.