문서번호	하천관리과-15199
결재일자	2017.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	치수설비팀장	하천관리과장
방만천	백성현	09/25 손경철

상수외 4개소 빗물펌프장 증설사업

공정회의 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 09.

하천관리과

(치수설비팀)

상수외 4개소 빗물펌프장 증설사업

공정회의 개최결과 보고

2017년 발주되어 현재 공사중인 빗물펌프장 상수외 4개소 증설사업과 관련, 공사장 현안사항 및 ‘17년 예산 집행계획에 대한 공정회의를 개최하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

○ 대    상 : 상수외 4개소 빗물펌프장 증설공사

- 상수, 당인(마포구), 염창1(강서구), 행당(성동구), 한남(용산구)

○ 공사기간 : 2017. 05. ~ 2018. 12.

○ 공사목적

- 빗물펌프장 방재능력을 서울시 방재목표기준인 30년 빈도에 맞게 증설

○ 공사내용

- 빗물펌프장 모터펌프 증설 및 유수지 증설 등

Ⅱ		공정회의 개최

○ 일 시 : 2017. 9. 22(금) 15:00~15:40

○ 장 소 : 하천관리과장 집무실

○ 회의내용

- 사업별 공사 추진현황 및 예산 집행계획

- 추진상 문제점 및 현안사항 검토 등

○ 참 석 자 : 자치구 사업담당팀장

Ⅲ		회의결과

○ 빗물펌프장별 현황 및 추진방안

구 분	현황 및 문제점	추진방안	공정율 (%)
상수	· 하천외 구역 토출관로 시공중 · 하천 점용허가 협의지연으로 1차 시공분 절대공기 부족	· 서울지방국토관리청과 하천점용 허가 적극협의하여 사업추진	10
당인	· CIP 및 SHEET PILE 천공작업 · 인접부지 저촉으로 인한 구조물 단면 축소 설계변경으로 절대공기 부족	· 구조물 단면축소 등 설계도서 작성 및 하천점용허가 협의 완료하여 사업추진	5
염창1	· 관급자재 구매 및 H-PILE 천공 · 수방기간 중 펌프가동을 위해 본 공사 미추진	· 4/4분기에 철근가공조립, 콘크리트 타설 등 1차공사 연내 준공	30
행당	· 철도보호지구내 행위신고 협의 지연으로 공정율 저하	· 한국철도시설공단의 요구자료 제출 등 적극협의하여 1차공사 연내 준공	5
한남	· 유수지 진입로 및 도수로 설치 · 조달청과 관급자재 공급 업체간 재계약 지연으로 공정율 저하	· 기초파일, 가시설 시공 및 토공사 완료하여 1차공사 연내 준공	9

○ 예산집행현황 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2017년 예산			비 고
		예산액	집행액	이월 예정액
상수	6,872	1,900	423 (22%)	450 (24%)
당인	11,469	2,900	723 (25%)	900 (30%)
염창1	5,979	1,750	-	-
행당	10,373	2,198	635 (30%)	25 (1%)
한남	9,879	2,800	645 (23%)	-

【하천관리과장 당부사항】

○ 사업장 안전관리 철저로 안전사고 예방

○ 사업예산이 전액 집행 될 수 있도록 집행방안 강구하여 불용 및 이월 최소화

○ 내년 우기 기간중에도 펌프가 가동 될 수 있도록하여 공정관리

○ 망원배수구역에 대한 자연재해지역지정 검토 적극추진

Ⅳ		향 후 계 획

○ 서울지방국토관리청, 철도시설공단, 한전 등 유관기관과의 협의 적극추진하여 공사추진

○ 예산불용 및 이월을 최소화하여 예산의 효율적 집행. 끝.