아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	강동구청장(치수과장)
(경유)
제목	“둔촌로 하수암거 신설공사" 도로점용공사장 교통소통대책 변경 승인 요청 회신

1. 치수과13378 (2017.9.22)호와 관련하여, 교통소통대책 변경에 대해 아래와 같이 승인 통보하오니, 성실히 이행하시기 바랍니다.

2. 공사중 교통소통대책 변경으로 인하여 다른 공사와 공사기간 및 단계별 교통소통대책에 대한 문제가 발생할 경우 우리시와 추가 협의하여 주시기 바라며, 공사로 인한 교통정체 해소 및 보행자 안전사고 예방 등을 지속적으로 실시하면서 공사를 진행하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 지  점 : 방이역사거리∼둔촌종합상가교차로

나. 교통소통대책 변경 사항

변 경 전	변 경 후	변경 사유
공사기간 2017.2.21. ∼2017.9.30	공사기간 2017.2.21. ∼2017.10.30	굴착공사구간 지장물 산재 및 장마철 우천일수 과다로 공사 지연

다. 교통소통대책 변경 조건

- 단계별 상황에 맞는 교통안내표지판 및 안전시설물 설치 강화

- 출퇴근 시간대에 공사차량 진출입 금지

- 공사시 통제수 배치 및 공사 완료후 통보

○ 도로점용허가를 받지 아니하거나 점용면적을 초과하여 점용함으로써 교통정체를 유발시키는 공사장은 점용허가 및 점용료 징수부서에 통보하여 변상금 또는 과태료를 부과토록 조치합니다.

○ 서울시와 협의하지 않고 공사를 진행도중 교통, 보행 민원이 발생한 경우 공사시행자(시공사, 감리사, 현장소장, 감리단장)에게는 패널티를 부여, 업무담당자는 문책토록 각 기관별 감사담당실로 통보 조치합니다.

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	백바름		교통운영팀장	서인석		교통운영과장	09/25 강진동
협조자
시행	교통운영과-18532	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	2133-2466	/전송		/	pblqw6293@seoul.go.kr	/	대시민공개