“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울”
	119특수구조단
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	2017년 헬기(AS365N2)부품 수리오버홀 계약변경 의뢰

1. 관련근거

가. 행정지원과-7032(2017.05.16)호「계약체결 [2017년 헬기부품 수리오버홀] 알림」

나. 소방항공대-3464(2017.09.19)호「2017년 헬기(AS365N2)부품 수리오버홀 계약변경 기술검토 계획」

다. 소방항공대-3500(2017.09.21)호「2017년 헬기(AS365N2)부품 수리오버홀 계약변경 기술검토 결과」

2. 위와 관련하여 수리오버홀 계약건 헬기부품(7종 9점)중 회전계지시계에 대한 제작사 검사결과「사용불가」판정으로 수리오버홀비용 변경에 따른 기술검토회의를 실시하여 아래와 같이 계약변경을 의뢰합니다.

가. 계약건명: 2017년 헬기(AS365N2)부품 수리오버홀

나. 소요예산: 금160,495,000원(부가세 포함)

구 분	금 액	변경내용
계약금액	160,978,000원	회전계지시계 금액변경
감액금액	483,000원
변경금액	160,495,000원

다. 용역기간: 2017. 12. 10(변동없음)

라. 계약상대자: (유)에어버스 헬리콥터스 코리아(대표: 에릭랑데)

- 업체주소: 서울시 용산구 한남대로 130(한남동, 볼보빌딩 3층)

- 담당자: 박주영(02-3279-6720)

마. 계약방법: 수의계약

바. 예산과목: 특수구조단운영/소방항공대운영/공공운영비

붙 임 : 1. 제작사 검사서 1부.

2. 견적서(계약변경) 1부.

3. 산출기초조사서(계약변경) 1부.

4. 2017년 헬기(AS365N2)부품 수리오버홀 계약변경 기술검토 결과 압축화일 1부.  끝.

	소방항공대장
★담당자	박영춘		담당자	정기수		3팀장	김정식		소방항공대장	09/25 김용관
협조자	담당자	김수재
시행	소방항공대-3542	(		)	접수		(		)
우	07505	서울특별시 강서구 하늘길 84(김포국제공항 경항공기 지역) 서울 소방항공대	/
전화	02-3706-1935	/전송	02-3706-1939	/	pyc4771@seoul.go.kr	/	부분공개(7)