투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	『참나무시들음병 방제사업』 정산 설계 변경 시행

1. 녹지관리과-8411(2017.09.26)호와 관련입니다.

2.『참나무시들음병 방제사업』에 대하여 아래와 같이 정산 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 참나무시들음병 방제사업

나. 공사기간 :  2017. 9. 14 ~ 2017. 10. 11

다. 총사업비 : 금9,475,200원(금구백사십칠만오천이백원)

- 도급 비 : 금9,475,200원(금구백사십칠만오천이백원)

- 관급 비 : -

라. 시 공 사 :******************

마. 설계변경 내용 : 별첨 참조

바. 도급비 및 관급비 변경 내역

(단위 : 원)

구분		소요 금액			비고
		당초	변경	증
총 공 사 비		9,475,200	10,527,200	1,052,000
도급비	소계	9,475,200	10,527,200	1,052,000
	공급가액	8,613,818	9,570,182	956,364
	부가세	861,382	957,018	95,636

사. 예산과목 : 푸른도시국 자연생태과, 생태복원 및 보전과 야생동물보호, 생태계보전사업, 산림병해 방제, 시실비 및 부대비, 시설비

붙 임 : 1. 공사실정보고서 1부.

2. 설계변경도서 1부. 끝.

주무관	김완수		녹지관리팀장	임광빈		녹지관리과장	09/26 김윤철
협조자	재무팀장	김기중
시행	녹지관리과-8446	(		)	접수		(		)
우	04628	서울시 중구 삼일대로 231(예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02)3783-5944	/전송	02)3783-5949	/		/	부분공개(5)