문서번호	시설보수과-8506
결재일자	2017.9.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
이동섭		신동헌	09/26 한동근
협조
	주무관		김종성

사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)

기성(총차5회, 2차1회) 검토 보고

2017. 9

서부도로사업소

(시설보수과)

사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)

기성(총차5회, 2차1회) 검토 보고

우리 사업소에서 시행하고 있는 「사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)」와 관련하여 건설사업관리 용역사로부터 공사부분 기성검사(제5회) 결과 제출에 따른 검토 보고임. ※ 관련근거:공사기성(5회) 기성검사 결과제출(한국건설관리공사 토목0531-2384(‘17.9.26))

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)

○ 공사기간 : (총차)2016. 4. 12 ~ 2017. 10. 11

○ 계 약 자 : 신안종합건설 대표 박순석

○ 계약금액 : 3,524백만원 (2차 – 1,760백만원)

○ 공사규모 : 교량확장 폭30m→37m, 연장 90m

성능개선 폭 10m, 연장 90m, DB18→DB24

○ 건설사업관리단 : 한국건설관리공사 / ㈜대한콘설탄트

□ 주요 추진사항

○ 2016. 4월~10월 : 확장부 하부 기초 시공

○ 2016. 11월~2017. 3월 : 확장부 하부구조물 시공(교각, 받침 등)

○ 2017. 4월~7월 : 확장부 빔 거치 및 슬래브 타설

○ 2017. 8월~9월 : 성능개선부 기존슬래브 철거작업 진행중

□ 기성(총차5회, 2차1회) 검토 보고

○ 전회까지 기성액 : 1,764,000천원(50%)

○ 금회 기성액 : 524,700천원(15%)

○ 누계 기성액 : 2,288,700천원(65%)

○ 주요 반영내용

- 확장공사 : 교대사면 계단정비, 기존교량 교면방수 및 포장,

인접 보도구간 경계석 및 블록포장 등

- 성능개선 : 기존교량 철거(78%), 교통안전시설물 설치, 보행안전도우미 투입정산, 기타 제경비 정산 등

□ 공사비(2차 계약분) 집행 현황

(단위:천원)

구 분	계약금액	전회까지 기성액	금회 기성액	기성잔액
공 사 비	1,760,600	-	524,700	1,235,900
집 행 율		-	29.8%	70.2%

□ 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리단으로부터 제출된 공사 기성부분 검사(총차5회,2차1회) 결과에 대하여 현장 시공 확정분 기성 반영내역과 관련 준공도서 등을 확인한 결과,

○ 2차공사 계약물량 중 철거 등 시공부분에 대한 공사비 반영 및 정산이 적정한 것으로 판단되므로 기성부분 준공 처리코자 함.

붙임 : 1. 기성검사 결과보고(감리단) 1부.

2. 기성내역서(총차5회) 1부.  끝.