＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	물량변동에 따른 공사 실정보고 회신 {공릉배수지(5,6지) 내부방식공사}

1. 이준 북부-1708-59(2017.9.18.) 및 1708-60(2017.9.26.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 위탁 감독중인 『공릉배수지(5,6지)내부방식공사』의 실정보고에                대한 검토 결과를 다음과 같이 회신하오니 공사감독 업무에 철저를 기하여

주시기 바랍니다.

가. 설계시 천정, 바닥, 벽체 및 도류벽 등 단면 보수 설계시 폼타이제거

및 단면보수 물량이 건조 후 수분함수율이 10% 내외의 건조상태에서

단면복구에 필요한 실제 보수 물량에 차이 발생한 실정으로,

나. 공릉배수지 5,6지 내부열화로 인한 폼타이제거 및 단면보수 공정의                추가물량에 대하여 현장 실사 한 바 타당하므로 추후 설계변경시                 반영조치 하시고 공사의 시급성을 감안, 자재(도막,시트, 패널)설치에            따른 후속 공사 공정추진에 만전을 기하시기 바랍니다.   끝.

	북부수도사업소장
수신자	신봉건설(주) 대표 최기병,이준엔지리어링(주) 대표 나석근
주무관	최용진		급수운영과장	09/26 장종욱
협조자
시행	급수운영과-22035	(		)	접수		(		)
우	01137		/
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/		/	대시민공개