현장실정보고

주무관	주무관	급수운영과장		결재
박기련	김용현	09/26 전명수
협 조

문서번호 :	급수운영과-17360

우리사업소에서 시행하는 아래 공사에 대하여 서울시시설관리공단의 현장실정보고가 제출되어 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

현    황

공 사 명 : 마천동200-99 외 6개소 배급수관 정비공사

공사기간 : 2017. 4. 10. ~ 2017. 12. 7.

도 급 액 : 523,809,184원

계 약 자 : (주)이엔씨탄탄  대표 소복경

관련문서 : 공사감독2처-10890

보고 내용

서울시시설관리공단에서 다음과 같은 실정보고가 제출됨.

제 목	서울시시설관리공단 보고내용
1구간 터파기량 증가	하천 복개구조물이 상수도관 부설 위치에 인접하게 설치되어 있어 터파기시 복개구조물 주변의 토사 슬라이딩이 발생되는 실정이며 안전사고 발생방지를 위하여 슬라이딩 되는 토사를 제거 후 공사를 시행함이 옳을 것으로 판단됨
1, 2구간 폐기물 발생량 증가	2구간 굴착결과 일부구간의 콘크리트포장 및 아스팔트 덧씌우기 포장도로로 확인되어 폐기물 발생량 증가분에 대해 설계반영하고 1, 2구간의 터파기중 포장층 추락으로 인한 안전사고 발생 방지를 위하여 확폭한 아스팔트 포장깨기를 시행하고 증가된 아스팔트 포장깨기 및 폐기물 물량에 대하여 설계반영 하고자 함

보고자 의견

상기 보고 사항을 검토한 안전사고 방지를 위해 토사 제거 후 공사를 시행하고 터파기중 확폭한 포장깨기 및 증가된 폐기물 물량에 대하여 붙임과 같이 회신하고자 합니다.

첨부  1. 검토보고 의견서 및 위치도 각1부.  끝.