문서번호	정보통신보안담당관-19136
결재일자	2017.9.26.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		통신망관리팀장	정보통신보안담당관
임종학		김이곤	09/26 김완집
협조

- 남산예장자락 재생사업에 따른 - 초고속정보통신망 광케이블 이설계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
남산 예장자락 재생사업	공공재생과	예산 재배정	완료	********
	도시기반시설본부	공사일정 및 방법	완료

2017. 9.

정보통신보안담당관

(통신망관리팀)

- 남산예장자락 재생사업에 따른 -

초고속정보통신망 광케이블 이설 계획

공공재생과에서 추진 중인 『남산예장자락 재생사업』구간내 매설된 우리시 초고속정보통신망 광통신시설물을 조기 이설하여 해당구간내 초고속망 이용기관에 대하여 무중단 행정정보서비스를 제공하고자 함.

▢ 공사개요

❍ 공 사 명 : 남산예장자락 재생사업 초고속망 이설공사

❍ 위    치 : 서울시 중구 예장동 4-1번지 일대

❍ 이설구간 : ***************************

❍ 작업내용 : 서울시 초고속정보통신망 광케이블(2조) 이설 및 접속

❍ 초고속정보통신망 광케이블 사용현황

****	****	**	****	*****	***	******
**********	******	***	**	**	***	**
		***	**	**	***	**
		***	****	**	**	**
	******	***	**	**	**	**
		***	***	**	**	**
********** ******	******	*	**	**	**	**
		*	*****	**	**	**
		*	****	***	****	***
****	******	*********		**	**	**

※ 남산 예장자락 재생사업

◀ 사업목적

- 도심부에 시민휴식공간을 조성하고 교통체계 개편으로 남산의 접근성 향상

◀ 사업개요

- 위    치 : 중구 예장동 4-1번지 일대(23,494㎡)

- 사업기간 : 15.1월 ~18.3월

- 사 업 비 : 688억원 (16년 예산 : 시비 68억, 국비 5억 )

- 사업내용 : 공원,주차장,친환경 교통시설(곤돌라) 신설 등

▢ 세부 이설방안 (임시이설, 본공사 2회 시행)

① 1차 : 터파기 공사전 우회루트 활용 임시 가공포설

****************************************************************************************************************************

② 2차 : 시공사에서 사업구간 지중관로 설치완료 후 지중포설(본공사)

*************************************************************************************************************************

▢ 예산사항

❍ 소요예산 : *********

구분	계	소요예산		비 고
		광케이블 포설 및 접속	IP주, 통신관로
합계	******	******	******
1차	******	******	*****
2차	******	******	******

❍ 예산과목 : 공공재생과, 공공 재생계획 수립, 공공개발 및 공공공간 확충, 남산예장자락 재생사업, 시설비

❍ 예산확보 : 공공재생과에서 정보통신보안담당관에 예산 재배정

▢ 공사발주

❍ 1차공사 : 우회루트를 이용한 임시 이설

- 계약방법 : 수의계약(1인견적)

※ 공사의 시급성을 감안하여 광케이블 공사 전문업체(여성기업)와 수의계약 실시

- 관련법령 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 추정기격 1억원 이하인 공사(전문공사)

- 수의계약사유

․ 금번 공사대상인 광케이블 선로는 서울시의 모든 행정․민원 정보 및 인터넷 트래픽을 유통하는 초고속정보통신망 광통신 시설물로서 해당구간의 선로는 서울시 소방재난본부, 종합방재센터 및 예하 소방서, 남산별관을 연결하고 있는 중요 시설물임.

․ 본 공사는 남산예장자락 재생공사 시행전 완료하여야 하는 긴급공사로 시울시 초고속정보통신망 구조에 관한 이해도가 높고 자치구 이용기관 초고속망 이설공사 경험이 풍부한 여성기업과 수의계약을 체결 하고자 함.

❍ 2차공사 : 사업구간 관로시공 완료 후 경쟁입찰 예정(별도시행)

▢ 향후계획

❍ 예산 재배정 요청(공공재생과)	: ´17. 9.26

- 요청금액 : ************** ※2차 소요예산은 공사일정 맞춰 요청

❍ 계약 체결 및 착수	: ´17. 9.27 ~ 9.30

❍ 우회 루트를 이용한 광케이블 포설 및 임시개통	: ´17.10.1 ~ 10.13

❍ 지중관로 시공, 광케이블 포설 및 정상개통	: ´17.12월 이후

붙 임	: 1. 초고속정보통신망 광케이블 포설도 1부.

2. 공사시방서(1차) 1부.

3. 원가계산서(1차, 2차) 각 1부.

4. 견적서(1차) 3부.  끝.