문서번호	정보시스템담당관-11324
결재일자	2017.9.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정정보기획팀장	정보시스템담당관
이운심		이영순	09/26 이기완
협조

행정포털 웹표준·웹접근성 개선 사업

주간업무 현황보고(9월3주차)

2017. 9.

정보시스템담당관

행정포털 웹표준·웹접근성 개선 사업

주간업무 현황보고(9월3주차)

사업개요

❍ 사 업 명 : 행정포털 웹표준·웹접근성 개선 사업

❍ 사업기간 : 2017. 6. 1. ~ 2017. 12. 1.

❍ 계 약 자 : (주)시도우

❍ 사업금액 : 금113,000천원

주간 보고 내용

❍ 추진기간 : 2017. 9. 15. ~ 2017. 9. 21.

❍ 진 척 율

단계	계획	실적
전체	67%	53%
사업관리(착수)	100%	100%
분석	100%	35%
설계	100%	71%
구현	77%	27%
테스트	48%	3%
운영이관	0%	0%

❍ 추진실적

- 로그인 화면 결정

- 프로타입에 맞춰 행정포털 적용 개발

❍ 사업 추진 현황

- 계획대비 –14% 추진 중으로 일정지연 상태

- 일정 만회를 위하여 개발인력 추가 및 테스트 전담인력 지정 지원하였으나 일정 지연에 따른 WBS 조정 필요

❍ 담당자 의견

- 10월 20일까지 개발이 완료되지 않을 경우 사업기간 지연 예상

붙임 : 1. 주간업무 현황 보고서 1부.

2. 회의록 1부.

3. 작업분할표(WBS) 1부.  끝.