문서번호	정수시설과-3524
결재일자	2017.9.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김종원		김긍채	09/26 임철수
협 조
	원수관리과장			유통희
	주무관			한충규
	주무관			함인석

2018년 시행예정

강북 취·정수시설물 정밀안전진단 사업계획

2017.  9.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

2018년 시행 예정

강북 취·정수시설물 정밀안전진단 사업계획

『시설물의안전관리에관한특별법』에 따라 취․정수시설물에 대해 정밀안전진단 용역을 실시하여 구조적 안정성과 결함의 원인 등을 조사, 측정, 평가함으로서 시설물의 안전성을 확보하고자 함

1		추진개요

□ 목 적

○ 소정의 경험과 기술을 갖춘 책임기술자가 현장조사 및 각종 시험에 의해 시설물의 물리적, 기능적 결함 및 내재되어 있는 위험요인을 발견하고,

○ 이에 대한 신속하고 적절한 조치 및 보수·보강방법을 제시하여 시설물의 안전성을 확보

□ 근 거

○ 시설물의안전관리에관한특별법 제6조 및 같은법 시행령6조

- 1종시설물(1일 공급능력 3만톤 이상의 지방상수도)의 정밀안전진단*은 이전 정밀안전진단 완료한 날을 기준으로 5년에 1회(안전등급 B)

* 정밀안전진단 : 시설물의 물리적·기능적 결함을 발견하고 그에 대한 신속하고 적절한 조치를 하기 위하여 구조적 안정성과 결합의 원인 등을 조사·측정·평가하여 보수·보강 등의 방법을 제시하는 행위

** B등급(2013년 취·정수장시설물 안전진단결과 등급)

□ 대상시설물

○ 강북정수장(100만톤/일), 강북취수장(105만톤/일)

- 건축물(고도처리시설 및 기존정수처리 건축물 및 본관동)

- 정수장내 옹벽(6~15m, L =199m)

2		’18년 사업계획

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 2018년 강북아리수정수센터 취·정수시설물 정밀안전진단 용역

○ 사업기간 : 2018. 3월 ~ 12월 21일

○ 설계금액 : 576,000천원

○ 용역세부내역

시설물명	시 설 용 량	준공년도	위 치	비고
강북정수장	Q = 1,000,000㎥/일	1999년	경기도 남양주시 고산로 171
강북취수장	Q = 1,050,000㎥/일 건축물 : 5,566㎡	1996년	경기도 남양주시 와부읍 경강로 682
옹 벽	H = 9 ~ 15m L = 87.4m H = 6 ~ 15m L = 111.6m	1996년	경기도 남양주시 와부읍 경강로 682
도송수관로	D = 2400 ~ 2600mm L = 12,920m - 2~3열	1999년	경기도 남양주시 와부읍 경강로 520번지 ~ 서울시계간(중랑구)
건축물	고도정수처리시설 본관 및 기존정수처리시설	2014년 1999년	경기도 남양주시 고산로 171

3		행정사항

○ 2018년 시행 예정인 정밀안전진단 기술용역사업에 대하여 예산반영 전 기술심사담당관에 기술용역 타당성 심사를 요청하고, 그 결과에 따라 예산액 반영 등 시행여부 결정

- 용역설명서 및 과업내용서는 사업확정시 발주계획 별도 수립후 시행

따로붙임 1. 내역서1.  끝.