아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다. -공모당선작 최우수-
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	물품 변경 계약 체결 (친환경 녹색정수장 조성공사(뚝도정수센터) 관급자재 구매)

1. 생산관리과-12417(2017. 9. 25.)호 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 ‘친환경 녹색정수장 조성공사(뚝도정수센터) 관급자매(레미콘 등) 구매 계약’을 아래와 같이 변경하여 계약을 체결코자 합니다.

가. 계약건명 : 친환경 녹색정수장 조성공사(뚝도정수센터) 관급자매(레미콘 등) 구매

나. 계약업체 : *******************

다. 계약금액 : 50,357,360원

라. 변경내용 : 납품기한 변경

구 분	당초	변경	비 고
기한	2017.9.26.	2017.10.26.	증 30일

마. 변경 사유

- 준공기한 연기에 따른 관급자재 납품기한 연기

따로붙임 : 변경 계약 검토서 등 각 1부. 끝.

주무관	황한범		재무회계과장	박병식		요금관리부장	09/26 조세연
협조자
시행	재무회계과-13012	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1243	/전송	02-3146-1209	/	h2sb@seoul.go.kr	/	부분공개(5)