아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다. -공모당선작 최우수-
	강남수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경(1차) 시행에 따른 계약의뢰 (2017년 청담동외 6개동 상수도공사)

1. 우리사업소가 시행 중인 『2017년 청담동외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여 설계변경(1차)을 아래와 같이 시행하고 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2017년 청담동외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 계 약 자 : ************

다. 계약기간 : 2017. 07. 05. ~ 2017. 12. 31.

라. 설계변경금액

(단위 : 원)

구 분		총 부기금액	1차수 금액(2017년)	2차수 금액(2018년)	비고
계약 금액	당초	************	************	************
	변경	************	************	************
	증감	***********	***********	***********

마. 설계변경 사유 : 계약물량 증ㆍ감 및 신규공종 발생에 따른 변경

바. 하자기간 : 준공검사일로부터 3년

사. 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 급.배수공사비, 신설공사비.

- 상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 개조공사비.

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비.

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비.

- 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축, 소방용수시설 등의

설치 및 관리, 일반회계, 소방용수시설 보수, 시설비.

- 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축, 소방용수시설 등의

설치 및 관리, 일반회계, 소방용수시설 설치, 시설비.

붙임 : 설계변경 관련문서 각 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	고원석		급수운영과장	09/26 박희철
협조자
시행	급수운영과-17692	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4844	/전송	02-3146-4889	/	kosword@seoul.go.kr	/	부분공개(7)