문서번호	기전과-13158
결재일자	2017.9.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
김동현		정판식	09/27 代김현수
협조

2017년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

제1회 기성검사 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 09

동부도로사업소

(기전과)

2017년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

제1회 기성검사보고

2017년 교통안전표지 유지보수공사(연가단가)에 대하여 제1회 기성검사를 보고함.

관련근거

○ 기성서류 제출 [(주)건양엔지니어링-140호(2017.9.25), 교통운영과 시공감리]

공사개요

○ 공 사 명 : 2017년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

○ 공사개요 : 강남구, 송파구, 강동구, 서초구 일부 시도 교통안전표지 유지보수 1식

○ 공사기간 : 2017. 3. 02. ~ 2017. 12. 20.

○ 계약금액 : 금79,712,632원

○ 계 약 자 : ㈜미화 대표 유호석

기성현황

○ 기성검사일 : 2017. 09. 27.

○ 기성율(%)  : 42%

○ 주요 기성내역

- 작업지시 1차 ~ 3차(92개소) 표지판 및 철주(부착대) 신설, 철거, 교체

․ 표지판 신설  99매, 철거  21매, 교체 20매

․ 철  주 신설 13set, 철거  2set, 교체 2set

․ 부착대 신설 21set, 철거 11set, 교체 5set

기성금액현황                                             (단위:원)

계약금액	전회기성금액	금회기성금액	누계기성금액	잔여금액	비고
79,712,632	-	33,460,000	33,460,000	46,252,632

조치계획

○ 상기공사에 대하여 공사지침서 및 설치기준에 적합하게 시공되었기에, 기성준공처리하고자 함.

붙 임  : 1. 기성내역서 1부

2. 기성사진 1부.

3. 기성서류 제출 공문 사본(감리단) 1부.  끝.