등록번호	전산정보과-15870		★주무관		CCTV관리팀장		전산정보과장		행정관리국장
등록일자	2017.9.27.
			문병길		김묘순		문상용		전결 09/27 한수경
결재일자	2017.9.27.
공개구분	대시민공개
			협조	공원팀장		김건한		주차관리2팀장		이순이
				정보통신팀장		안용래		마을공동체팀장		代황정희
				폐기물관리팀장		류진규
				교통시설팀장		박태서
『2017년 중구 CCTV 통합 구매·설치』완료 보고
행정관리국 전산정보과

「2017년 중구 CCTV 통합 구매·설치」 완료 보고

주민의 안전을 지키기 위해 CCTV를 설치하고 성능개선하는 『2017년 중구 CCTV 통합 구매·설치』 사업을 완료하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		사업 개요

사 업 명 : 2017년 중구 CCTV 통합 구매·설치

사업기간 : 2017.1 ~ 9월

책정예산 : 1,098,000천원[구비 904,000/시비 194,000]

(단위:천원)

관리부서	계	신규설치	이전설치	성능개선	비 고
총 계	1,098,000	506,000	60,000	532,000
자치행정과	742,000	374,000		368,000	구비(592,000) 시비(150,000)
	사업내용	17,000천원 *방범22개소		4,000천원 *92개소
주차관리과	208,000	88,000	60,000	60,000	구비(208,000)
	사업내용	44,000천원 *2개소	15,000천원 *4개소	4,000천원 *15개소(전광판)
공원녹지과	44,000			44,000	구비(44,000)
	사업내용			응봉공원 41만화소 3개소
청소행정과	60,000			60,000	구비(60,000)
	사업내용			1,000천원*60개소
교통행정과	44,000	44,000			시비(44,000)
	사업내용	22000천원* 2개소

계약 내용

❍ 계약업체 : 동아테크놀로지(대표자 김한승)

❍ 계약금액 : 848,546,480원(조달수수료 : 6,421,000원 별도)

❍ 계약방식 : 제한경쟁입찰(조달 총액 계약)

Ⅱ		추진 경과

추진 일자	내 용	비 고
2017.1. ~ 3월	CCTV 설치 위치 선정, 주민의견 수렴, 자가통신망 설치 검토, 행정예고
2017.3.28.	사업 계획 수립
2017.4.07.	사업 발주 의뢰
2017.4.12. ~ 4.17.	사전 규격 공개
2017.5.2. ~ 5.16.	입찰 공고
2017.5.16. ~ 5.19.	계약 이행 능력 심사
2017.5.19.	계약 체결
2017.5.25.	착공계 제출
2017.5.26. ~ 9.4.	도로 굴착, CCTV 구축, 안내판 디자인 검토 IP주소 설정, 자가통신망 설치, 전기사용 신청
2017.9.5. ~ 9.15.	CCTV 설치 장비 시운전
2017.9.18. ~ 9.26.	현장 실사 및 준공 검수

Ⅲ		추진 결과

CCTV 신설로 안전 사각지대 해소 : 총 27개소 94대

❍ 용도별 CCTV 설치 현황                                   (단위: 대)

구 분	계	방범(23개소)	스쿨존(2개소)	주정차(2개소)
회전형카메라	24	20	2	2
고정형카메라	70	59	5	6
위치 선정 부서		자치행정과	교통행정과	주차관리과

☞  24개소를 중구 자가통신망으로 구축하여 연간 28,800천원 예산절감

❍ 주요 설치 물품

품명	제조사	모델명	규격	설치 대수	이미지
회전형카메라	한화테크윈	XNP-6330RH	200만화소, 야간 IR적용	22
회전형카메라 (주차단속용)	나인정보시스템	NS-SD2030IRA	200만화소, 야간 IR적용	2
고정형카메라	트루엔	TCAM-4322HBR	200만화소, 야간 IR적용	70

CCTV 이설로 민원 해소 : 주정차 4개소

☞  3개소를 자가통신망으로 구축하여 연간 3,600천원 예산절감

저화질(41만화소) 범죄 예방 CCTV 전체 200만 화소로 교체
☞ 총 155개소 155대 (방범 92, 공원3, 쓰레기감시 60)

❍ 주요 설치 물품

품명	제조사	모델명	규격	설치 대수	이미지
회전형카메라	한화테크윈	XNP-6330RH	200만화소, 야간IR적용	95
고정형카메라 (쓰레기단속용)	사)장애인인권센터ICT사업단	HDCP-4322HBR	200만화소, 야간IR적용	60
	☞ 중증 장애인 생산품 구매로 장애인 지원

노후 주차단속전광판 교체로 주차단속 안내 개선(총 15개소)

제조사	규격	설치 수량
포스테크	3-COLOR LED전광판	15대

CCTV 증가에 따른 관제시스템 증설로 안정적인 센터 운영

❍ 추가된 카메라 통합 연계를 위한 저장분배서버 소프트웨어 증설

제조사	모델명	규격	설치 수량
리얼허브	XIDE NVR	CCTV통합관제, Vmware 기반 리눅스용	3 copy

❍ CCTV영상 저장을 위한 스토리지 증설

제조사	모델명	규격	설치 용량
HITACHI	HUS 150	4TB * 48 개	Physical 276 TB

❍ 증가된 통신 트래픽 수용을 위한 자가망 OLT 모듈 증설

제조사	모델명	규격	설치 수량
다산네트웍스	V5724GPIU	C2Port PON interface	2 장

Ⅳ		예산 사용

부서별 예산 사용 현황                                  (단위: 원)

부서명	예산 구분	발주금액	지출금액 (조달수수료 포함)	비고
총 계		1,052,796,460	854,967,480	·조달수수료 6,421,000원
자치행정과	시비 (자산취득비)	150,000,000	150,000,000	보조금(시비) 전체 사용으로 구비 차액 증가
	구비 (자산취득비)	562,396,460	422,692,700
청소행정과	구비 (자산취득비)	57,000,000	45,822,080
주차관리과	구비 (시설비)	57,000,000	45,822,070
	구비 (자산취득비)	140,600,000	113,027,780
공원녹지과	구비 (시설비)	41,800,000	33,602,850
교통행정과	시비 (시설비)	44,000,000	44,000,000

Ⅴ		시험 결과

사업 구분	점검 항목	결 과
CCTV 신설	설치 안정성, 주변 환경과의 조화, 신규 장비들의 정상작동 여부	적합
CCTV 이설	설치 안정성, 주변 환경과의 조화, 기존 장비들의 정상 작동 여부	적합
카메라 고도화	카메라 화질 확인, 정상 작동 여부	적합
전광판 교체	주차단속 안내 문구 정상 표출 여부	적합
관제시스템 증설	관제시스템 정상 동작 확인	적합

Ⅵ		운영·관리 계획

구 분	내 용
CCTV 운영	- 방범, 스쿨존, 공원 CCTV는 통합관제센터에서 연중무휴 관제 실시 - 주차단속 CCTV는 단속 시간 외에는 방범용으로 전환하여 사용 - CCTV 영상 보관 기간 : 30일
유지 관리	- CCTV 유지관리는 전산정보과 CCTV관리팀에서 실시 - 자가통신망 유지관리는 전산정보과 정보통신팀에서 실시 - 성능개선으로 철거된 물품들은 유지보수용으로 사용
요금 납부 (전기,통신)	- 전산정보과 : 방범/스쿨존 CCTV 요금 납부 - 공원녹지과 : 공원 CCTV 요금 납부 - 주차관리과 : 주차단속 CCTV 요금 납부

붙 임 : 1. 설치 위치 현황 1부.

2. 설치 사진첩 4부.  끝.