문서번호	도로관리과-15964
결재일자	2017.9.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로굴착관리팀장	도로관리과장
엄태용		오석관	09/27 배광환
협조
	주무관		최현

노면하부 동공탐사 구간조정 검토보고(2단계)

2017. 9.

안전총괄본부

도로관리과

노면하부 동공탐사 구간조정 검토보고

도로함몰 예방사업으로 추진하고 있는 『2017년 노면하부 동공탐사용역(2단계)』 탐사구간을 사전조사한 결과 지하차도 및 복개도로구간 등이 포함되어 있어 탐사구간 조정을 위한 검토결과를 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2017년 노면하부 동공탐사용역(2단계)

○ 과업내용 : 서울시내 간선도로 540km, 동공 311개소

○ 용역기간 : 2017.7.5. ~ 2018.3.1.

○ 용 역 비 : 881백만원

○ 계 약 자 : 지케이엔지니어링(주)

○ 추진현황 : 1차 탐사 330km, 분석 165km, 발견동공 39개소

□ 현   황

○ 당초 계획한 탐사연장 구간에 지하차도와 복개도로구간 및 기탐사 완료구간이 존재하여 대체노선이 필요함

□ 검토내용

○ 1차 탐사전 현장조사결과 지하차도, 복개도로구간, 기탐사 완료구간 등으로 동공탐사가 곤란한 지역은 탐사구간에서 제외

○ 제외된 축소물량에 대하여는 지하매설물이 다수 분포되어 동공발생 가능성이 있는 구간으로 대체하여 탐사 추진

○ 탐사구간 조정계획

당 초				변 경
도로명	차로		탐사연장 (㎞)	도로명	차로		탐사연장 (㎞)
	수	연장 (㎞)			수	연장 (㎞)
계			60.85	계			61.6
성북구 정릉로	4	2.0	8.0	성북구 오패산로	4	0.9	3.6
				동대문구 보문로	7	0.3	2.1
서대문구 연희로	6	2.8	16.8	성북구 보문로	4	0.6	2.4
				성북구 보문로	5	1.2	6
영등포구 대방천로	6	1.2	7.2	동대문구 무학로	5	0.8	4
				동대문구 무학로	4	0.6	2.4
영등포구 대방천로	4	1.1	4.4	성동구 무학로	5	0.6	3
				관악구 쑥고개로	4	1.4	5.6
서초구 효령로	7	2.5	17.5	서초구 바우뫼로	4	1.5	6
				서초구 바우뫼로	5	0.6	3
송파구 양재대로	10	0.5	5.0	성동구 광나루로	5	0.6	3
				성동구 고산자로	11	0.4	4.4
송파구 양재대로	8	0.8	6.4	성동구 살곶이길	4	1.2	4.8
				중구 청파로	6	0.6	3.6
현장답사에 따른 연장 조정			-4.45	중구 만리재로	5	0.9	4.5
				마포구 토정로	4	0.8	3.2

※ 현장답사에 따른 연장 조정 : 터널과 고가구간 및 좌회전 차선 등을 고려하여 조정함

□ 조치의견

○ 상기 탐사구간 조정계획과 같이 동공탐사 구간을 변경 시행코자 함.

첨부 : 대체 탐사노선 요청 공문 1부.   끝.