문서번호	도시철도계획부-9791
결재일자	2017.9.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	도시철도설계과장	도시철도계획부장		도시철도국장
안창호	이명수	권영찬		09/28 형태경
협 조	도시철도사업부장		박동룡
	주무관		안대성

-별내선(8호선연장) 2공구 건설공사-

업무 인계·인수서

2017. 9.

도시기반시설본부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

업 무 인 계·인 수 서

별내선(8호선연장) 2공구 건설공사와 관련 설계도서 및 관련서류  일체를 공사부서로 인계·인수하여 관련업무 추진에 만전을 기하고자 함.

□ 업무 인계·인수 부서

○ 인계부서 : 도시철도국 도시철도계획부

○ 인수부서 : 도시철도국 도시철도사업부

□ 업무 인계·인수 기준일

○ 2017. 9. 29(금)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015년 ～ 2022년

○ 총사업비 : 5,163억원

- 공사비 3,835,설계비 332,감리비 156,시운전비 등 757,시설부대비 7,보상비 76

합 계	국 가	서울시	경기도	개발부담금
5,163	2,786	1,229	667	481

○ 별내선 2공구 현황

구분	내 용	비고
위치	서울 암사 현대홈타운 ～ 구리시 토평동
공사기간	착공일로부터 2,190일(72개월)
규모	○ 토 목 본선(복선): 총연장 L=2,535.77m - NATM 터널공법(복선): L=1,209.47m - 쉴드TBM 터널공법 : L=1,279.7m - 본선환기구 2개소(급,배기) : L=46.6m
***	****************
***	*******
***	******************

□ 추진경위

○ ‘06.    7. : 별내지구 광역교통개선대책 확정(건교부)

○ ‘06. 10. : 별내선 광역철도 예비타당성조사 완료(기획예산처)

○ ‘07. 12. : 제1차 대도시권 광역교통시행계획 반영(국토부)

○ ‘10.5~’11.8 : 별내선 타당성조사 및 기본계획 용역시행(경기도)

○ ‘13.11.     : 타당성조사 및 기본계획 보완용역 착수(경기도)

○ ‘14.12. 8  : 총사업비 조정결과 통보(국토부)

○ ‘14.12.18 : 별내선 기본계획 승인 및 고시(국토부)

○ ‘15.09.18 : 별내선 1,2공구 기본 및 실시설계 용역 착수(서울시)

○ ‘16.07.15 : 별내선 1,2공구(토목 등) 실시설계 설계VE 시행

○ ‘16.09.21 : 별내선 1,2공구 실시설계 건설기술심의위원회 심의

○ ‘16.10.04 : 별내선  1,2공구 사전재해영향성검토 심의(기술심사담당관)

○ ‘16.10.20 : 별내선 1,2공구 총사업비 조정 신청(서울시→국토부)

○ ‘16.11.08 : 별내선 1,2공구 환경영향평가 완료(환경부)

○ ‘16.11.14 : 별내선 1,2공구 사업계획승인 신청(국토교통부)

○ ‘17.01.06 : 별내선  1,2공구 사전재해영향성 검토 협의 완료(국민안전처)

○ ‘17.02.28 : 별내선 1,2공구 사후환경영향평가 조사용역 계약체결

○ ‘17.05.12 : 별내선 1,2공구 건설공사 발주

○ ‘17.05.31 : 별내선 건설공사 기본 및 실시설계용역 준공

○ ‘17.06.13 : 별내선 1,2공구 사업계획 승인

○ ‘17.07.06 : 별내선 2공구 공사계약 방법 변경(대안→기타공사)

○ ‘17.07.26 :  별내선 1,2공구 공사손해보험 용역 입찰공고

○ ‘17.08.10 : 별내선 1,2공구 공사손해보험 용역 계약

○ ‘17.08.17 : 별내선 건설공사 2공구 현장설명회 개최

○ ‘17.09.14 : 별내선 건설공사 2공구 개찰

○ ‘17.09.29 : 별내선  건설공사 2공구 공사계약 체결

□ 업무 인계·인수 서류

○ 별내선(8호선연장) 건설공사 2공구 계약서

○ 별내선(8호선연장) 건설사업 1,2공구 환경영향평가서. (旣 8.21인계)

○ 별내선(8호선연장) 건설사업 교통영향평가서. (旣 8.21인계)

○ 별내선(8호선연장) 기본 및 실시설계 준공도서.(旣 8.21 인계)

○ 별내선(8호선연장) 관련 문서목록에 따른 문서 일체. (旣 8.21 인계)

○ 별내선(8호선연장) 1,2공구 건설공사 공사손해보험용역 계약서.(旣 8.21 인계)

○ 별내선(8호선연장) 1,2공구 건설공사 사후환경영향조사용역 계약서.(旣 8.21 인계)

******************************************************

붙임 : 1.별내선(8호선연장) 건설공사 2공구 계약서 1부.(별송)