투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한연기 의뢰(시립중계노인전문요양원 녹색자금나눔숲 조성공사)

시립중계노인전문요양원 녹색자금 나눔숲 조성공사 준공기한을 아래와 같이 연장을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사현황

- 공 사 명 : 시립중계노인전문요양원 녹색자금 나눔숲 조성공사 시행

- 공사기간 : 2017. 08.22 ~ 2017. 09.30

- 도 급 비 : 금24,473,721원

- 도 급 사 : 보훈종합건설(주) 대표 송계점

나. 준공기한 연기

공 사 명	계약일	착공일	준 공 기 한		비 고
			당 초	변 경
시립중계노인전문요양원 녹색자금 나눔숲 조성공사 시행	‘17.8.18	‘17.8.22	‘17.09.30	‘17.10.13

다. 연기사유

- 기관의견, 기술자문, 현장여건 변화 등으로 설계 물량 변경등이 있어

절대 공사 기간이 부족

라. 지체상환금 부과 여부 : 미부과

붙 임 : 1. 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서(별첨) 1부.   끝.

	녹지관리과장
주무관	안순호		푸른광장팀장	강병기		녹지관리과장	09/28 김윤철
협조자
시행	녹지관리과-8524	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231 (예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5950	/전송	02-3783-5949	/	018shan@seoul.go.kr	/	대시민공개