문서번호	동남권사업단-8176
결재일자	2017.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	공간계획팀장	동남권계획반장	동남권사업단장		지역발전본부장
우인식	오장환	강성욱	최경주		08/04 代최경주
협 조
	도시공간개선반장			안재혁
	주무관			오상민

잠실종합운동장 주경기장 리모델링 국제설계공모 시행계획(안)

2017. 8

지역발전본부

동남권사업단

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

잠실종합운동장 주경기장 리모델링

국제설계공모 시행계획(안)

국제교류복합지구 잠실종합운동장 주경기장 리모델링 사업에 대한 창의적 설계를 위한 국제적 관심 제고 및 홍보를 위해 국제설계공모를 시행하고자 함

1		공모 필요성

□ 배    경

○ 국제설계공모 추진으로 국제교류복합지구 조성사업에 대한 홍보 및 붐업 조성

○ 창의적이고 상징적인 공간계획을 위해 국제설계공모로 추진할 필요가 있으며 지난 ‘15.5월 국제아이디어 공모를 시행하여 입상작 8개팀에게 초청권을 부여함에 따라 이들을 대상으로 지명초청공모로 추진

※ 근거 :『건축서비스산업진흥법』제21조에 따른 우수한 건축물 조성을 위해 공모방식 적용

□ 기본방향

○ 국토부의『건축 설계공모 운영지침』및 서울시의『공공건축 설계공모절차 및 기준안』에 따른 체계적이고 객관적인 공모방식 적용

○ 전문성, 공정성 확보를 위해 관련 분야 전문가로 전문위원회 구성·운영

2		추진 경위

○ 잠실종합운동장 일대 도시재생 구상(아이디어) 국제공모 시행(‘15. 5.~ 9)

- 입상작 8개 팀에게 주경기장 리모델링 설계공모 지명초청권 부여

○ 코엑스~잠실운동장 일대 국제교류복합지구 조성사업 기본계획 수립(‘16.12.2)

○ 주경기장 리모델링 타당성조사 및 기본계획 수립 완료(‘17. 7.28 )

3		국제설계공모 추진계획

□ 공모 개요

○ 공 모 명 : 잠실종합운동장 주경기장 리모델링 국제설계공모

○ 공모방식 : 지명공모 (국제지명초청)

○ 참가자격 : 2015년「잠실종합운동장일대 도시재생 구상 국제공모」에 입상작으로 선정되어 지명초청권이 부여된 8개 팀 (따로붙임1 지명초청공모대상자 명부)

○ 공모범위 : 주경기장 리모델링 사업 대상지 일대

○ 공모내용 : 건축물과 지상, 지하 및 연계 공간의 디자인 설계

- 시설 배치 등 토지이용, 차량 및 동선, 경관 등 부문별 설계

○ 인센티브(안) : 당선작 설계권 부여, 그 외 입상작 차등 보상금 지급

□ 전문위원회(자문단) 구성·운영

○ 전문위원회 구성

- 주경기장 리모델링 사업에 대한 이해도가 높은 분야별 전문가 3~10인으로   전문위원회 구성

○ 전문위원회 역할 : 기획 및 설계공모 진행 전반적인 사항에 대한 자문

- 공고내용 및 시기 결정, 공모지침 마련, 홍보 및 공모운영방안 검토 및 자문

- 심사기준안 마련 및 심사위원 후보추천, 심사위원회 운영 지원

- 접수된 공모안에 대한 공모지침 및 규정 준수여부 검토

○ 전문위원회 선정

- 위원 선정 : 도시분야 1명, 건축분야 3명, 교통분야 1명 (추후 세부계획수립시 위원 선정확정)

○ 전문위원회 운영

- 운영기간 : 공모전 사전기획 단계부터 당선작 선정시까지

- 운영방법 : 월 2회 개최(기간 및 주기는 상황에 따라 탄력적으로 조정 가능)

4		공모관리용역 시행계획

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 잠실종합운동장 주경기장 리모델링 국제설계공모 관리용역

○ 용역기간 : ‘17. 9.~(계약일로부터 8개월)

○ 용 역 비 : 300백만원

○ 예산과목 : 도시재생 및 공공개발, 국제교류복합 공간육성(도시개발특별회계),

잠실종합운동장 주경기장 리모델링, 시설비(401-01)

○ 시행방법 : 일반용역

○ 과업내용

- 공모지침 : 일반지침, 콘텐츠기획방향, 설계방향, 유의사항 제시 및 참고자료 등

- 기획(조정) : 공모방향결정, 심사위원 초청 및 회의주관 등

- 홍    보 : 설계공모 통합 홈페이지 공고 및 관리지원, 초청 우편 등 홍보

- 질의회신 : 질의접수, 번역 및 질의회신

- 심    사 : 심사위원 초청, 응모작품 접수 및 심사진행 업무보조

- 기    타 : 전시·작품집 발간 등 공모 진행․관리에 필요한 전반적 업무

□ 발주 방법

○ 입찰 및 계약방법 : 일반공개경쟁입찰, 협상에 의한 계약

○ 근거법령 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조

○ 입찰참가자격

- 공고일 기준「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제31조 및 같은법 시행령 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)에 해당하지 아니한 자 중 다음 각 호에 해당하는 자

①  국․공립 및 정부 출연기관

②  교육법에 의한 대학, 전문대학 및 부설연구소

③  민법 또는 다른 법률에 의해 설립된 연구기관, 단체 및 법인

○ 선정절차

입찰공고	➡	입찰 등록 및 제안서 제출	➡	제안서 평가	➡	협상대상자 선정 및 통보	➡	협상 및 계약체결

○ 제안서 평가(안)

- 기술능력평가(80) + 입찰가격평가(20)

※ 제안서 평가계획은 추후 별도수립

5		향후 추진일정

○ ‘17. 8.         :  공모관리 용역 계약심사 및 용역 발주

○ ‘17. 9.         :  공모관리 용역 계약 및 착수

○ ‘17.11.         :  공모공고, 현장설명회 (공모지침 확정 및 배포)

○ ‘17.11.~ 12.  :  참가자 등록, 질의응답

○ ‘18. 3.~ ’18.4 :  공모안 접수, 작품심사

○ ‘18. 5.         :  시상 및   입상작 전시

6		행정사항

○ 관계부서 협조사항

- 설계 공모 관련 자문 : 도시공간개선단

- 서울시 홈페이지 배너 게시 : 정보화기획담당관

- SNS 등 활용 홍보 : 뉴미디어담당관

- 전광판 및 지하철 영상 매체 홍보 : 시민소통담당관

- 작품접수 및 보관, 심사 및 시상식 장소 : 총무과

따로붙임 1. 지명초청공모대상자 명부 1부.

2. 공모관리용역 과업내용서 1부.

3. 산출내역서 1부. 끝.