투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	우이-신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구) 변경계약 의뢰

1. 도시철도사업부-10593호(2017.9.28)호와 관련입니다.

2. 우이-신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구)과 관련하여 물가변동(22회) 및 상주감리원 투입계획 조정으로 인해 다음과 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 우이-신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구)

나. 계 약 자 : ㈜평화엔지니어링 외 2개사

다. 용역기간

구 분	당 초	변 경	비 고
총 괄	2009.01.07 ~ 2017.09.30	2009.01.07 ~ 2017.09.30	변경없음
8 차	2016.01.17 ~ 2017.09.30	2016.01.17 ~ 2017.09.30	변경없음

라. 용역금액 조정 내역

(단위 : 원)
구분	당 초	변 경	증 ․ 감	사유
총괄 (제26회)	4,373,507,000	4,380,907,000	증) 7,400,000	∘계약금액 : 증) 7,400,000 ∘사유 - 물가변동 반영 증)9,460,000 - 감리배치 조정 감)9,460,000 - 건축감리 기간 연장 감)7,400,000
8차 (제5회)	1,003,000,000	1,010,400,000	증) 7,400,000	∘계약금액 : 증) 7,400,000 ∘사유 - 물가변동 반영 증)9,460,000 - 감리배치 조정 감)9,460,000 - 건축감리 기간 연장 감)7,400,000

마. 예산과목

- 신교통수단도입, 경전철건설사업, 우이-신설 지하경전철건설, 시설비 및 부대비, 감리비

붙  임 1. 계약금액 조정 검토보고서 1부.

2. 변경내역서(총괄 제25회) 1부.

3. 변경내역서(제8차 4회) 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	도시철도사업부장
주무관	윤대희		경전철1과장	김형섭		도시철도사업부장	09/28 박동룡
협조자	주무관	위성환		경리과장	최정수
시행	도시철도사업부-10601	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 빌딩 9층 도시철도사업부	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7181	/전송	02-772-7305	/	cals97@seoul.go.kr	/	부분공개(5)