문서번호	버스정책과-5463
결재일자	2017.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정류소관리팀장	버스정책과장
강설영		代이오수	08/25 김정윤
협조

2016년 가로변정류소 이용환경 개선공사 실정보고

(콘크리트블록 변경 구매)

2017. 8.

도시교통본부

(버스정책과)

2016년 가로변정류소 이용환경 개선공사 실정보고

(콘크리트블록 변경 구매)

2016년 가로변정류소 이용환경 개선공사 추진 중 당초 구매한 콘크리트블록을 아래와 같이 변경구매 하고자 함

□ 콘크리트블록 구매현황

○ 건    명 : 가로변정류소 이용환경 개선공사

○ 구매금액 : 금8,877,680원(조달수수료 47,680원 포함)

○ 납품기한 : 2017. 8. 30.

○ 구매내역

(단위 : 원)

물품 분류번호	품명	규격	단위	수량	단가	품대	조달 수수료	합계
30131502 (22130947)	콘크리트블록	JJS-07, 200×200×60㎜	㎡	883	10,000	8,830,000	47,680	8,877,680

□ 변경구매 사유

○ 승강장 시인성 확보를 위해 승강장 구간은 콘크리트블록(인조화강석)으로 복구 시행

기존	변경

※ 콘크리트블록 복구 제외 구간 : 휠체어대기공간(1.5×1.5m) 및 기존 화강판석으로 마감된 정류소

○ 정류소 승강장에서 교통약자와 버스이용시민이 버스를 대기하거나 승하차 시 미끄러움 방지를 위해 쇼트 표면처리 및 표면이 가공된 된 콘크리트블록으로 변경구매하고자 함

구분	당초 구매제품	변경 구매제품
품분류번호 (식별번호)	30131502(22130947)	30131502(22516032)
규 격 명	보차도용콘크리트블록, JJS-07, 200×200×60㎜, 보도용, 투수, 회색	보차도용콘크리트블록, JJC-43, 200×200×60㎜, 내츄럴블록, 보도용, 컬러, 투수
특 징	물고임 방지	· 물고임 방지 · 쇼트 표면처리 : 제품표면에 붙어있는 불순물 또는 가는 입자 제거 · 거친 표면가공 : 미끄러움 방지
단 가	10,000원	22,500원

※ 콘크리트블록 변경구매에 따른 구매금액

(단위 : 원)

구분	당초 구매금액	변경 구매금액	구매금액 증감
합계	8,877,680	19,974,780	증	11,097,100
품대	8,830,000	19,867,500	증	11,037,500
조달수수료	47,680	107,280	증	59,600

□ 조치계획

○ 관급자재 변경구매 시행(재무과)

- 콘크리트블록(물품분류번호 22516032) 구매요구

- 콘크리트블록(물품분류번호 22130947) 구매취소.  끝.