문서번호	도시철도사업부-10609
결재일자	2017.9.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공정관리과장	도시철도사업부장
원길묵		김형건	09/29 박동룡
협 조
	건축공사과장			김내환
	시설전기과장			서태창
	주무관			박형복

우이신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(3공구) -

물가변동 및 투입계획 변경으로 인한 계약금액 조정 검토

(총괄 23회, 8차4회)

2017. 9.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

우이신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(3공구) -

물가변동 및 투입계획 변경으로 인한 계약금액 조정 검토

(총괄 23회, 8차4회)

우이신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(3공구) 계약자의 물가변동 및 감리원 투입계획 변경 등으로 인한 계약금액 조정 요청에 대한 검토 보고임.

Ⅰ				용 역 개 요

○ 용 역 명 : 서울시 우이신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(3공구)

○ 계 약 자 : ㈜동일기술공사 외 4개사

○ 계약현황

(단위:천원, 부가세포함)

구 분	계 약 일	계 약 기 간	계 약 금 액	비 고
총 괄	2008.12.31	2009.01.07 ~ 2017.09.30	4,764,895
1 차	2008.12.31	2009.01.07 ~ 2009.12.18	107,000	준 공
2 차	2009.12.11	2009.12.19 ~ 2011.02.16	499,800	준 공
3 차	2011.02.16	2011.02.17 ~ 2012.02.17	572,000	준 공
4 차	2012.02.08	2012.02.18 ~ 2013.05.01	706,500	준 공
5 차	2013.05.02	2013.05.02 ~ 2014.03.05	415,000	준 공
6 차	2014.03.06	2014.03.06 ~ 2015.06.02	898,000	준 공
7 차	2015.06.03	2015.06.03 ~ 2016.03.29	682,895	준 공
8 차	2016.03.30	2016.03.30 ~ 2017.09.30	883,700	진행중

Ⅱ				검 토 내 용

○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정

- 관련 근거

․입찰안내서「기술용역계약 특수조건」제9조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

․우이신설 도시철도 민간투자사업 감리물가변동 기준(도철공무부-10244, 2010.11.30)

- 조정방법 : 소비자물가지수 변동율 적용

- 조정 시점

․기준시점 : ´08. 11. 30(입찰일 기준 : ´08. 12. 24)

☞ 소비자물가지수 : 86.837

․비교시점 : ´17. 06. 30(감리용역 실투입공정률 해당 계획공정 환산 시점의 직전 분기말)

☞ 소비자물가지수 : 102.670

※ 조정시점 산출

산 출 기 준		총 괄	8 차	비 고
공정률 (´17.09.30.기준)	계 획	100% (364.215인.월)	100% (65.446인.월)
	실투입	100% (364.215인.월)	100% (65.446인.월)
비교 시점	실공정	´17. 9. 30.
	물가지수 적용	´17. 6. 30.		직전 분기말

- 소비자물가지수 변동율 : 18.23%

․기준시점(2008. 11. 30) 소비자물가지수 : 86.837

․비교시점(2017. 06. 30) 소비자물가지수 : 102.670

※ 소비자물가지수 변동율 산출

소비자물가지수 변동율 =	(비교시점 소비자물가지수 – 기준시점 소비자물가지수)	× 100
	기준시점 소비자물가지수

=	(102.670 – 86.837)	× 100	= 18.23%
	86.837

- E/S 적용 현황

(단위:천원, 부가세 별도)

구분	변경전 공급가액					조정율 (6)	조정금액 (5)×(6)= (7)	조 정 적용금액
	공급가액 (기성금액) (1)	제외 금액			E/S적용금액 (1)-(4)=(5)
		기시행분 (2)	손해보험 (3)	소계 (2)+(3)=(4)
총괄	4,321,896	4,150,660	61,040	4,211,700	110,196	18.23%	20,089	20,000 (십만원이하 절삭)
8차	112,176	0	1,980	1,980	110,196	18.23%	20,089	20,000 (십만원이하 절삭)

감리원 투입계획 조정 현황

○ 감리원 투입계획 조정 현황 (E/S 반영, 투입계획 변경)

- 건축분야 공기지연으로 배치기간 연장 2개월

‣ 1회 : 6.30 → 7.31. (도철건축부-6165, '17.7.21.) / 2회 : 7.31 → 8.31. (도철건축부-6165, '17.7.21.)

구 분			총괄용역		8차용역		비고
			당 초	변 경	당 초	변 경
계			365.225	364.215	66.455	65.446
토목	수석 감리사	수석	‘09.08.25~’13.01.14	변경없음	-	-
		감리사	‘13.01.15~’14.11.30 ‘17.02.01~’17.09.30	변경없음	- ‘17.02.01~’17.09.30	- 변경없음
		감리사보	‘14.12.01~17.01.31	변경없음	‘16.03.30~’17.01.31	변경없음
	감리사	감리사	‘10.07.09 ~‘13.01.14	변경없음	-	-
		감리사보	‘13.01.15~’15.06.30	변경없음	-	-
	감리 사보	감리사보	‘09.08.25~’13.01.06 ‘13.04.01~’15.12.20 ‘17.01.01~’17.03.12	변경없음	- - ‘17.01.01~’17.03.12	- - 변경없음
		검측감리	‘15.12.21~’16.12.31 ‘17.03.13~’17.08.31	변경없음	‘16.03.30~’16.12.31 ‘17.03.13~’17.08.31	변경없음 변경없음
	감리사보		‘11.11.07~‘13.01.06	변경없음	-	-
	감리사보		‘14.12.01~’15.06.20	변경없음	-	-
	검측감리원		‘15.12.21~’16.06.30	변경없음	‘16.03.30~’16.06.30	변경없음
	검측감리원		‘15.12.21~’16.06.30	변경없음	‘16.03.30~’16.06.30	변경없음
토질	감리사보		‘14.04.01~’14.11.14	변경없음	-	-
안전	감리사보		‘14.01.02~’14.09.30 ‘15.03.20~15.12.20	변경없음	-	-
지중	검측감리원		‘14.10.01~’15.12.20	변경없음	-	-
건축	감리사보		‘15.07.15~’16.05.31 ‘16.06.26~’17.03.12	변경없음	‘16.03.30~’16.05.31 ‘16.06.26~’17.03.12	변경없음
	검측감리원		‘17.03.13~’17.06.30	‘17.03.13~’17.08.31	‘17.03.13~’17.06.30	‘17.03.13~’17.08.31	2개월 증
기계 설비	감리사		‘15.05.11~’15.10.31	변경없음	-	-
	감리사보		‘15.11.01~’17.03.12	변경없음	‘16.03.30~’17.03.12	변경없음
	검측감리원		‘17.03.13~’17.08.31	변경없음	‘17.03.13~’17.08.31	변경없음
전기	중급		‘15.05.11~’16.06.24 ‘16.12.01~’17.03.12	변경없음	- ‘16.12.01~’17.03.12	- 변경없음
	초급		16.06.25~16.11.30 ‘17.03.13~’17.07.31	변경없음	16.06.25~16.11.30 ‘17.03.13~’17.07.31	변경없음 변경없음

용역 준공에 따른 정산

○ 계약금액 예상 조정 반영분 정산

- 준공전 최종 차수계약임을 감안 과업기간 변경 방지를 위해 사전에 반영한 예상 물가변동분(16%~18%)의 실제 물가상승률 반영 정산 (감 28,150천원)

※ 감리원 투입계획 및 물가변동에 따른 계약금액 조정

(단위:천원, 부가세포함)

구 분	계약금액	조정금액				변경계약 금액
		소 계	물가변동	감리배치조정	준공 정산
총괄분	4,764,895	증) 11,150	증) 22,000	증) 17,300	감) 28,150	4,776,045
8차분	883,700	증) 11,150	증) 22,000	증) 17,300	감) 28,150	894,850

Ⅲ				조 치 계 획

○ 물가 변동, 건설사업관리기술자 투입계획 변경 및 용역 준공 정산에 따라 총괄 및 8차 용역 계약을 변경코자 함.

○ 책임감리용역 조정 내용

(단위:천원, 부가세포함)

구 분	당 초		변 경		비 고
	계약기간	계약금액	계약기간	계약금액
총 괄 (23회)	`09.01.07~ `17.09.30	4,764,895	`09.01.07~ `17.09.30	4,776,045	․ 계약기간 : 변경 없음 ․ 계약금액 : 증) 11,150 ․ 변경사유 - 물가변동분 반영 : 증) 22,000 - 감리 인원 조정 : 증) 17,300 - 준공 정산 : 감) 28,150
8 차 (6회)	`16.03.30~ `17.09.30	883,700	`16.03.30~ `17.09.30	894,850	․ 계약기간 : 변경 없음 ․ 계약금액 : 증) 11,150 ․ 변경사유 - 물가변동분 반영 : 증) 22,000 - 감리 인원 조정 : 증) 17,300 - 준공 정산 : 감) 28,150

붙  임   1. 감리단 공문(관련 서류) 1부.

2. 변경 설계내역서 각 1부

3. 건축분야 감리원 투입계획 검토 보고서 각 1부.  끝.