투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 체결 보고(마포소방서 옥상녹화, 텃밭조성 공사)

1. 시설과-3208(2017. 9. 26.)호와 관련됩니다.

2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 변경계약이 체결되었음을 보고합니다.

가. 건    명 : 마포소방서 옥상녹화, 텃밭조성 공사

나. 계 약 자 : ㈜한설그린 대표 옥승엽

다. 계약금액 : 금161,799,500원(금일억육천일백칠십구만구천오백원)

라. 공사기간 : 2017. 8. 7.~ 2017. 10. 5.

마. 변경내용 : 준공기한 변경

○ 당초 : 2017. 10. 5. → 변경 : 2017. 10. 31.

붙임  공사계약서류 각 1부.  끝.

★주무관	김호영		주무관	조기환		공원운영과장	문근식		서부공원녹지사업소장	09/29 김종근
협조자
시행	공원운영과-15967	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	300-5512	/전송	300-5527	/	sky500611@seoul.go.kr	/	부분공개(6)