문서번호	주거재생과-12221
결재일자	2017.9.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주거재생계획팀장	주거재생과장
김수환	김승훈	09/29 국승열

『가리봉 앵커시설 리모델링공사 실시설계 용역관련』

용역 준공기한 연장계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시재생본부

(주거재생과)

『가리봉 앵커시설 리모델링공사 실시설계 용역관련』

준공기한 연장계획

가리봉 내 매입한 벌집의 “앵커시설 리모델링 공사 실시설계” 에 대해 내실있는 성과를 위한 용역 준공기한을 연장하고자 함

Ⅰ		개 요

❏ 용역개요

용역명	계약자	계약금액	계약기간	비고
가리봉 125-8 앵커시설 리모델링공사 실시설계용역	********* ******	***********	‘17.4.5~ ’17.10.1
가리봉 105-10 앵커시설 리모델링공사 실시설계용역	*********** ******	***********	‘17.4.5~ ‘17.10.1

Ⅱ		과 업 변 경

❏ 준공기한 연장

용역명	계약 기간		비고
	당초	변경
가리봉 125-8 앵커시설 리모델링 공사 실시설계용역	‘17.4.5 ~ ’17.10.1	‘17.4.5 ~ ’17.10.31	30일 연장
가리봉 105-10 앵커시설 리모델링 공사 실시설계용역	‘17.4.5 ~ ‘17.10.1	‘17.4.5 ~ ‘17.10.31

- 금액변경 : 없음

- 귀책소재 : 서울특별시

- 지체상금 : 미부과

❏ 변경사유

- 추진 중인 설계용역 세부내역에 대하여 시 · 구 관계부서 의견 검토 및 설계도서 조정에 따른 내실있는 성과물을 도출하고자 용역기간 추가 소요

첨부 : 1. 준공기한 연장의뢰서 1부.

2. 합의각서 각1부

3. 과업지시서 각1부. 끝.