문서번호	동북권사업단-9802
결재일자	2017.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	서울아레나팀장	동북권사업반장
이시연	이유국	09/29 한병준

동북권체육공원 주변 보행환경개선 용역 회의결과 보고

2017. 9.

동북권체육공원 주변 보행환경개선 용역 회의결과 보고

□ 회의개요

○ 일    시 : 2017. 9. 27. (수) 15:40 ~ 16:45

○ 장    소 : 청계별관 5층 회의실

○ 참 석 자

- 서울시 : 동북권사업단장

- 도봉구 : 지속가능발전추진단장, 도시관리국장

- 용역사 : ㈜동일기술공사

○ 회의안건 : 현안사항 및 실시설계 등 향후 추진계획

□ 회의결과

【마을버스 회차로 조성】

○ 창포원 내 T자 회차로 조성 시 도시계획시설 도로‧공원 중복결정 등의 행정절차 없이 추진할 수 있도록 관계부서(공원녹지정책과, 북서울꿈의숲관리사무소) 협의

- 1안 : 도시계획시설 공원 변경 없이 추진(공원면적 변경 없음)

- 2안 : 회차로 부분만 도시계획시설 공원 해제(공원면적 축소)

※ 관계부서 협의 곤란 시 시의원을 설득하여 사업 추진

【출입구 신설 및 바이패스 설치】

○ 환승주차장 측 i-센터를 철거한 후 현재 GS리테일 상가부지를 확보하는 방안에 대해 서울교통공사 및 GS리테일과 협의

○ 서울교통공사 임대료 보상에 대해 법률 자문, 사례 분석 등을 통해 보상비 없이 사업을 추진할 수 있는 방안 검토

○ 신설 출입구는 엘리베이터를 설치하는 방안 검토

- 경사로 조성 시 규정상 1/12이하의 경사를 준수하여야 하므로 대전차방호시설 예술창작공간 부지의 점용이 필요하고 이에 따른 도시계획시설 변경 등 행정절차가 수반됨

○ 바이패스 추가 설치에 따라 발생하는 보상비는 도봉구에서 시의원에게 요청하여 추가 확보

【사업추진 관련사항】

○ 연말 내 공사가 착수될 수 있도록 도봉구에서 실시설계 조속 추진

- 사업단에서 도봉구로 협조(도봉구에서 실시설계 및 공사 추진) 요청 공문 시행

□ 향후계획

○ ‘17. 10. ~ 11. 중순 : 실시설계 및 계약심사 완료

○ ‘17. 11. ~ 12. 말     : 관련 인허가 수행 및 공사 계약

붙임 : 회의자료 1부.  끝.