문서번호	정수시설과-9516
결재일자	2017.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
함진각		유영춘	10/10 이성락
협 조
	정수과장			최철웅

2정수장 여과지제어반

제작구매설치 작업계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

영등포정수센터

(정수시설과)

2정수장 여과지제어반

제작구매설치 공정계획

우리센터 「2정수장 여과지제어반 제작구매설치」에 대하여 사업진행 계획 공유를 통하여 안정적인 생산관리 및 원활한 사업 진행을 위해 공정계획을 보고함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2정수장 여과지 제어반 제작구매설치

○ 사 업 비 : 374,457천원

○ 기    간 : ’17. 8.18.~12.16

○ 계약업체 : 이아이시텍(주) (대표:박순애)

○ 내  용

- 여과지 RCS 2면 교체

- 여과지 현장제어반 10면 교체

- 감시제어 S/W프로그램 수정 1식

□ 공정계획

구 분	’17.8		’17.9		’17.10			’17.11		’17.12
계 약	8.17
현장조사		8.21~9.4
승인도서제출 및 도서승인				9.5~9.29
자재발주 및 제작					10.1~11.2
공장 검사							10.30
밸브엑츄에이터 통신카드설치						10.10~11.2
납품설치 및 시운전									11.3~12.5
교육 및 준공												12.6~12.16

□ 세부공정계획

○ 밸브 액츄에이터 통신카드설치 (토,일은 작업중지)

구 분	여과지 수(개)	대 상 지	비 고
10월 11일 (수)	1	1지	오전 9시까지 역세척 및 배수완료
10월 12일 (목)	-	-	환경부 점검
10월 13일 (금)	1	10지	오전 9시까지 역세척 및 배수완료
10월 16일 (월)	1	2지
10월 17일 (화)	1	9지
10월 18일 (수)	1	3지
10월 19일 (목)	1	8지
10월 20일 (금)	1	4지
10월 23일 (월)	1	7지
10월 24일 (화)	1	5지
10월 25일 (수)	1	6지
합 계	10 개

○ 여과지 공정프로그램 플로우차트 검토

- 검토기간 : ’17.10.12~18.

- 검 토 자 : 생산책임자 및 부책임자, 중앙제어실장, 담당주무관

- 검토내용

□ 여과지 단계별 공정 프로세서 정합도

□ 역세 설정조건 및 조건값 정확성

□ 추가 설정사항 등

○ 공장검사

- 예정일자 : ’17.10.30(월)

- 검사장소 : 제작 공장(충남 공주시 소재)

○ 여과지 제어반 및 현장제어반 설치(토,일은 작업중지)

구 분	여과지 수(개)	대 상 지	비 고
11월 3일~8일 (4일)	1	5지
11월 9일~10일 (2일)	1	4지
11월 13일~14일 (2일)	1	3지
11월 15일~16일 (2일)	1	2지
11월 17일 (1일)	1	1지
11월 20일~21일 (2일)	1	6지
11월 23일~24일 (2일)	1	7지
11월 27일~28일 (2일)	1	8지
11월 29일~30일 (2일)	1	9지
12월 1일 (1일)	1	10지
합 계	10 개

.  끝.