문서번호	한양도성도감-10381
결재일자	2017.10.11.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
채희창		곽동진	10/11 심말숙
협조

『한양도성 통합관제망 구축 공사』

관급자재 사전 검수 결과 보고

2017. 10

문화본부

(한양도성도감)

『한양도성 통합관제망 구축 공사』

관급자재 사전 검수 결과 보고

한양도성 통합관제망 구축 공사와 관련하여 CCTV 폴 및 함체 등 제작 물품에 대해 설계도서에 맞게 제작 되는지 공장을 직접 방문 사전 검수를 진행하여 원활한 사업 완료에 만전을 기하고자 함

□ 검수개요

○ 일    시 : 2017. 9. 28.(목) 12:00 ~ 17:00

○ 장    소 : 경기도 파주 소재 공장

○ 대    상 : CCTV폴 25개, 자립형 제어함체 12개, 폴타입 함체 4개

○ 참 석 자 : 채희창 주무관, 알에프코리아(주) 김진필 부장

□ 검수결과(사진첨부)

○ 수    량 : CCTV폴 25개, 자립형 함체 12개, 폴타입 함체 4개 확인

○ 도장 상태 : 균일한 색상(기와진회색) 및 두께로 적정하게 도장됨

○ 외형및치수 : 일부 부적정

- CCTV폴 및 암 등은 치수에 맞게 제작

- 함체(자립형)의 전체적인 외형은 적정하나 윗면은 도면과 상이

☞ 함체의 윗면은 도면에는 경사지도록(∧) 되어있으나 실제 제작은 평평하게 제작

되어 주변경과과의 조화를 위해 다시 제작토록 함

□ 향후계획

○ 공사일정조정 : 함체 구조변경에 4일 정도 소요되어 수전 및 통신회선 개통 일정 등 조정

☞ 전체 공사 완료에는 무리 없음(시운전기간 10일 -> 6일 감소)

- ‘17.10.13 ~ 21 : 수전 및 통신회선 개통

- ‘17.10.13 ~ 25 : 폴 및 제어함체, 카메라 설치 완료

- ‘17.10.26 ~ 31 : 시범 운영