문서번호	급수운영과-22698
결재일자	2017.10.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
조민성	박장진	10/11 유용일

공사현장실정보고서 검토보고 6차

(한남동 배급수관 정비공사)

2017. 10.

중 부 수 도 사 업 소

(급수운영과)

1. 제    목 : 공사실정보고서 제출(6차)

(한남동 배급수관 정비공사 1구간 부분타절)

2. 관련근거

가. 공사감독2처-11165(2017.09.29.)

3. 공사현황

가. 공 사 명 : ***************************

나. 공사개요 : ********************

******************************************19

************************

***************************

*************************위정훈

4. 보고내용 및 검토의견

연번	구 간	서울특별시시설관리공단 요청내용	사업소 검토의견
1	1구간 (******** * *********)	❍ 1구간 관부설불가로 인한 부분타절(150m) - 본 1-2구간(C부~종점)의 관부설을 보도에 부설토록 설계되어 있으나, 보차도구간을 3회 16개소를 시험굴착결과 지하매설물(한전, 통신케이블 등) 및 지하구조물(지하철, 한전 및 통신맨홀)이 산재되어 있어서 관부설 하월 및 우회 시공을 할 수 없어 관부설(D=200mm)이 불가능한 실정임. - 또한, 그 일대에 154KV송전관로와 22KV송전관로가 매설되어 있어 전문 지식없는 장비굴착작업은 안전사고 위험이 있음. - 관부설이 불가능한 1-2구간(C부~종점)의 150m를 타절함이 타당함. - 개략공사비 : 감)18,000천원	〇 검토결과 : 타당함. 공정을 일부 변경하고 설계변경 및 시공시 전,중,후 사진을 확보하여 보고토록 조치하고자 함.

5. 조치의견

- 상기 검토 의견대로 감독업무를 수행하고 있는 서울특별시시설관리공단에 통보하여 시공에 만전을 기하도록 조치코자 하며

- 위 사항에 대해 *******에게 시행토록하고 비용**************에 대하여는 설계변경시 반영토록 통보코자 합니다.

별  첨 : 1) 관련공문 1부.

2) 공단 실정 보고서 1부.

3) 현장 실정 보고서 1부.

4) 실정 보고 접수공문 1부.

5) 횡단굴착 결과보고서 1부.  끝.