문서번호	시설보수과-7585
결재일자	2017.10.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
나철흠		박국남	10/11 代김현수
협 조
	주무관			김부호
	주무관			한상신

위례터널 외 3개소 정밀점검용역 결과 및 조치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 10.

동부도로사업소

(시설보수과)

위례터널 외 3개소 정밀점검용역 결과 및 조치계획

위례터널 외 3개소 정밀점검용역을 완료하고 용역결과 점검내용에 대한 조치계획을 수립하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ	용역개요

용 역 명 : 위례터널 외 3개소 정밀점검용역(석촌지하차도,대곡교,강일육교)

용역기간 : 2017.5.15.~9.21.

용 역 비 : 102,630천원

용 역 사 : 세안안전진단㈜ 대표 박기열

Ⅱ	용역결과 주요내용

가. 위례터널

상태평가 및 안전등급(종합평가 안전등급)

❍ 상태평가 B등급(결함점수 0.241), 안전성평가 A등급으로 종합평가 안전등급 B(양호)로 평가함

외관조사 결과(주요내용)

❍ 터널구간 천단부 종방향 균열에 대하여 하자보수후 주의관찰이 필요하며,

❍ 기타 균열폭 0.3mm미만의 균열 등에 대하여는 향후 점검시 진전유무 관찰을 위해 현상태 유지관찰이 바람직함.

나. 석촌지하차도

상태평가 및 안전등급

❍ 상태평가 B(결함점수 0.196)등급이며, 안전등급은 B등급으로 양호함

외관조사 결과(주요내용)

❍ 아스팔트 포장의 경우 노후화와 차량통행에 의한 반복하중, 2014년 코어천공홀 등으로 균열, 망상균열 등이 증가되고 있으며 전면 재포장 필요

❍ 배수로(U형측구)의 단면이 적어 집중강우시 차로침수 사례발생함에 따라 적정규모로 배수로 단면확대 필요

다. 대 곡 교

상태평가 및 안전등급

❍ 상태평가 B(결함점수 0.236), 안전등급은 B등급으로 양호함.

외관조사 결과(주요내용)

❍ 구교 및 신교의 바닥판 하면 조사결과 0.3mm미만의 균열은 일부 증가하였으나, 건조수축에 의한 균열로 보수필요성 없으며 주의관찰.

라. 강일육교

상태평가 및 안전등급

❍ 상태평가 B(결함점수 0.232), 안전등급은 B등급으로 양호함.

외관조사 결과(주요내용)

❍ 거더 외부(G4~G6) 하부 플랜지에 도장박락이 국부적 발생하였으나, 추가적 손상방지를 위해 보수필요, 기타 특이사항 없음

Ⅲ	조치계획

위례터널 하자보수 조치

❍ 위례터널 손상내역은 하자보수 기간내로서 시공사【코오롱글로벌(주)】에 하자보수 요청

석촌지하차도, 대곡교, 강일육교 조치

❍ “석촌지하차도”는 2018 예산반영 중으로 예산확보시 보수조치하고

기타, “대곡교”, “강일육교”에 대하여는 2017년도 일상유지보수공사에 포함하여 예산범위내 보수조치

붙임 : 시설별 보수.보강 손상내역 각 1부.  끝.