아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	1종교량 보수보강공사 건설사업관리용역 책임기술자
(경유)
제목	작업기간 연기요청에 대한 승인 통보(제13차 작업요청)

1. 1종교량 제17-252호(2017.10.10.)호와 관련입니다.

2. 위호로 제출한『2017 교량시설물 일상유지보수공사(강남)』작업지시(제13차)의 작업기간 연기요청에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 건설사업관리용역에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 작업기간 변경승인

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
제13차 작업요청	작업기간	2017.10.10.	2017.11. 8.	우천 및 추석연휴기간 작업지연

.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	서성만		강남일반교량팀장	이홍재		교량안전과장	10/12 한유석
협조자
시행	교량안전과-18292	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개