문서번호	한양도성도감-10405
결재일자	2017.10.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
채희창		곽동진	10/12 심말숙
협조

『한양도성 통합관제망 구축』

정보통신공사 설계변경 검토보고

2017. 10

문화본부

(한양도성도감)

『한양도성 통합관제망 구축』

정보통신공사 설계변경 검토보고

한양도성 통합관제망 구축 공사와 관련하여 설계도서 검토 결과 및 공사 현장 실정을 반영하여 설계변경 하고자 함

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 한양도성 통합관제망 구축 정보통신공사

※ 관급자재 : 한양도성 통합관제망 구축공사 관급자재(CCTV) 구매설치

○ 기    간 : ‘17. 7.11 ~ ’17.10.31

※ 관급자재 : ‘17. 7.25 ~ ’17.10.31

○ 계 약 자 : ㈜홍남테크, ※ 관급 : ㈜알에프코리아

○ 계약금액 : 178,309,150원, ※ 관급 :172,079,370원

○ 규    모 : 와룡·사직공원, 다산동 성곽길 등 CCTV 61대 설치

□ 관련근거

○ 한양도성도감-9507(‘17.9.12) : 한양도성 통합관제망 구축사업 관련 보고

□ 변경사항

○ 계약금액

- 도급공사

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
도 급 액	178,309,150	173,473,330	△4,835,820
공급가액	162,099,228	157,703,029	△4,396,199	물량+제경비+간접노무비
부 가 세	16,209,922	15,770,302	△439,620

- 관급자재

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
관 급 액	172,079,370	180,949,090	8,869,720
공급가액	156,435,797	164,499,180	8,063,383	물량변경
부 가 세	15,643,579	16,449,918	806,338

○ 물량변경

- 도급공사

구 분	변경내용	소요예산
계		△3,886,617
백악구간	성북쉼터 배관 및 케이블 공사 67m 감소	△3,860,967
	백악구간 OFD 2개 증가	149,324
	백악구간 카메라 1대 추가 케이블 공사 109m 증가	375,941
다산동 구간	다산동 성곽길 한전 인입 지중관로 70m 증가	1,241,349
기타 구간	백범광장 케이블 498m 감소	△1,717,602

- 관급자재

구 분	당 초	변 경	소요예산	비 고
계			8,063,383
카메라(회전)	28	30	4,046,662	유지관리용
카메라(고정)	33	31	△2,157,586	유지관리 추가 및 백범광장 제외
암(ARM)	7	10	787,728	사직공원 추가
함체(폴타입)	4	6	896,206	와룡공원 및 성북쉼터 추가
산업용스위치	16	18	1,563,866	와룡 및 사직공원 추가
UTP 전송장치	4	0	△2,702,756	백범광장 제외
PoE 인젝터	4	0	△200,756	백범광장 제외
서지보호기	0	20	3,662,027	설계오류
방송서버	0	1	2,167,988	설계오류

○ 제경비

- 도급공사

구 분		변 경 금 액(원)		증감
		당 초	변 경
계		16,169,481	15,786,876	△382,605
경비	고용보험료	889,724	870,208	△19,516
	산재보험료	3,988,420	3,900,933	△87,487
	산업안전관리비	2,575,248	2,503,345	△71,903
	건강보험료	1,640,134	1,604,157	△35,977
	연금보험료	2,402,314	2,349,618	△52,696
	노인장기요양보험료	107,428	105,072	△2,356
	기타경비	991,740	964,287	△27,453
일반관리비		1,268,203	1,233,716	△34,487
이 윤		2,306,270	2,255,540	△50,730

○ 간접노무비

- 도급공사

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
계			△126,977
간접노무비	5,788,708	5,661,731	△126,977

□ 보고자 의견

○ 설계도서 검토 결과 및 현장 여건을 반영한 내역으로, 원활한 사업추진을 위해 계약변경 의뢰하고자 함.

붙임 : 1. 설계변경 세부 내역 각 1부.

2. 한양도성 통합 관제망 구축 공사 현황보고 1부.  끝.