문서번호	정수시설과-9578
결재일자	2017.10.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박응희		유영춘	10/12 이성락
협조

설계변경 보고

(1정수장 활성탄지 퇴수밸브 교체공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 10.

영등포아리수정수센터

설계변경 보고

우리센터에서 시행중인 【1정수장 활성탄지 퇴수밸브 교체공사】시행중 신규공종 및 물량증감 사항이 발생하여 설계변경을 시행하고자 보고드림.

공사현황

◯ 공 사 명 : 1정수장 활성탄지 퇴수밸브 교체공사

◯ 공사기간 : 2017. 04. 21. ～ 10. 17.

◯ 계약금액 : *************

◯ 시공업체 : ***********

◯ 변경내용 : 별첨 “설계내역서” 참조

◯ 설계변경 관련근거

- 지방자치단체 공사계약일반조건 제4장(행정안전부예규 제253호)

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장8절,13장6절(행정안전부예규 제34호)

설계변경 사항

◯ 신규공정 발생 및 시공물량 증․감에 따른 설계변경

- 신규공종

․ ***********

- 물량증감

․ *********

◯ 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료, 납부내역 정산지급

- 국민연금법(제3조) 및 국민건강보험법(제45조)에 의거

◯ 산업안전보건관리비 사용내역 정산

- 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 제2장4조 별표2

◯ 공사비 증감 내역

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
계	***********	**********	***********
공급가액	**********	**********	***********
부가세	*********	*********	*********

조치계획

◯ 변경된 설계내용에 따라 건설공사 설계변경 심의 및 기성준공 처리절차 운영계획에 의거 설계변경 심의위원회를 개최하여 처리하고자 합니다.

첨부 : 1. 설계변경 내역서 1부 끝.