아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	중앙버스전용차로 흐름개선사업 추가 재배정 시행(태창빌딩, 초이주유소)

1. 교통운영과-15680(2017.8.16.), 성동도로사업소 기전과-7071(2017.10.11.) 호와 관련입니다.

2. 중앙버스전용차로 이용불편 민원 해소 및 교통체계 개선 등을 위해 재배정된 중앙버스전용차로 흐름개선사업(태창빌딩, 초이주유소)사업비와 관련 현장여건에 따른 설계도서 변경이 발생하여 아래와 같이 추가 재배정하고자 합니다.

가. 사업대상 : 태창빌딩앞/초이주유소앞

나. 필요예산 : 149,990천원

다. 추가예산 :  59,790천원

라. 재배정 내역

(단위 : 천원)

예산과목			재배정처	누계 배정액	기 배정액	금회 배정액	비 고
부서정책단위	세부사업	통계목
교통운영과 도시교통체계 및 소통개선 버스서비스 이용제고	중앙버스 전용차로 흐름개선	시설비 (401-01)		149,990	90,200	59,790
			성동도로사업소 기전과	20,400	14,380	6,020	태창빌딩
			중랑구청 교통지도과	12,000		12,000	태창빌딩
			동부도로사업소 도로보수과	117,590	75,820	41,770	초이주유소

첨부 : 요청공문 및 설계서 3부. 끝.

주무관	이민영		BRT팀장	박동욱		교통운영과장	10/12 강진동
협조자	주무관	김은영
시행	교통운영과-19336	(		)	접수		(		)
우	04515	서울시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동6층	/
전화	02-2133-2475	/전송	02-2133-1053	/	min02@seoul.go.kr	/	부분공개(5)