문서번호	건축부-17431
결재일자	2017.10.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
정호기		조영수	10/12 김진용
협 조

『서울혁신파크 1단계 조성공사』

건설폐기물처리용역 계약변경 검토 보고

2017.10.

서울특별시 도시기반시설본부

건 축 부

『서울혁신파크 1단계 조성공사 』

건설폐기물처리용역 변경계약 검토 보고

『서울혁신파크 1단계 조성공사 』건설폐기물처리용역 변경계약 요청에 대해 검토보고하고 계약변경 추진코자 함.

1		용역개요

용 역 명 : 서울혁신파크 1단계 조성사업  건설폐기물처리용역

위    치 : 은평구 통일로 684(녹번동 5번지)

규    모 : 지하1층/지상5층, 연면적 13,548.79㎡

용    도 : 교육연구시설,문화집회시설,근린생활시설

용역기간 : 2016.12.19 ~ 2017.10.18

용 역 비 : 417,236,000원         용 역 사 : ㈜인선이엔티

건설사업관리용역사 : ㈜동일건축     공사공정률 : 60%

2		변경내용 검토

관련근거 : 혁신파크 제17-368(2017.10.10)

계약변경내용

구 분		계 약 내 용		비 고
		변 경 전	변 경 후
기 간		‛16.12.19~‛17.10.18	‛16.12.19~‛17.12.15	공사기간 연장으로 기간증가 58일
금 액		417,236,000원	554,999,000원	137,763,000원증가
폐기물구분	폐콘크리트	180,510,570원	77,517,165원	설계과다로 물량 감소
	폐아스콘	4,132,144원	6,376,806원	전기, 통신관료 굴토추가
	건설폐재류	144,742,885원	380,862,265원	외부적벽돌 철거추가
	혼합폐기물	11,160,600원	15,728,992원	철거수량 증가
	혼합폐기물(폐판넬)	20,854,416원	0원	처리물량 없음
	부가세	55,844,185원	74,513,772원

3		감리자 검토의견

서울혁신파크 1단계조성공사의 공사기간연장과 철거량 변동으로 폐기물  물량이 변동되는 사항으로 용역기간 연장 및 용역금액 변경요청 함.

4		처리의견

상기와 같이 건설폐기물처리용역 변경계약을 추진코자 함

※ 사용예산 : 재배정된 아래예산의 잔여예산(157백만원)에서 사용가능

※ 예산과목 : 서울혁신담당관, 사회문제해결을 위한 사회혁신의제 발굴실행, 사회혁신기반조성 및 성과확산, 서울혁신파크 조성공사, 시설비

5		향후 추진계획

2017. 10 월  : 변경용역계약 체결

2017. 12월  : 용역준공

붙 임  서울혁신파크 1단계 조성사업 건설폐기물 처리용역 변경계약요청 1부.  끝.