문서번호	소방행정과-12148
결재일자	2017.10.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
신춘수	박송영	남성현	10/13 서순탁

근무환경 개선을 위한 -

홍은119안전센터 차고 매연배출 저감장치 설치 계획

2017. 10.

서 대 문 소 방 서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

근무환경 개선을 위한 -

홍은119안전센터 차고 매연배출 저감장치 설치 계획

소방차량에서 배출되는 배기가스로부터 직원들의 건강을 보호하기 위한 매연배출 저감장치를 설치하여 직원들의 건강보호 및 미세먼지 저감으로 대기질 개선에 기여하고자 함

Ⅰ

관련근거

소방공무원 보건안전관리 규정 제34조(유해물질 등 차단시설)

안전지원과-15733(2017.7.26.)「소방서 차고 매연배출 저감장치 시범       설치 수요조사 결과 알림」』

현장대응단-1801(2017.2.28.)호 『[특수시책] 소방청사(차고) 유해물질        분석 연구 결과보고』

Ⅱ

추  진  배  경

소방차량 출동·점검·훈련 등으로 발생하는 소방서 차고 내 매연(유해가스)에 상시 노출되는 현장활동대원의 호홉기 보건안전대책 필요

신속·효율적 재난대응을 위해 경유 소방차를 사용하나 디젤엔진 배기가스는 1등급 발암물질로 현장대원의 건강 및 대기질 개선을 위해 소방청사 차고에 매연 배출저감장치 설치 필요

청사 내 사무실 및 대기실이 차고와 인접하고, 차고 개방면적이 협소하여 배기가스 노출 빈도가 높음

Ⅲ

세부추진 계획

사업개요

❍ 사업대상 : 홍은119안전센터(서대문구 홍은중앙로 83)

❍ 확보예산 : ************

❍ 예산과목 : 소방활동 안전 및 보건강화 / 소방서 차고 매연배출 저감장치 설치 / 시설비(401-01)

사업계획

❍ 기    간 : 2017. 10. 13.(금) ~ 11. 24.(수)

❍ 사업범위 : 홍은119안전센터 1층 차고 및 소방차량(3대)

❍ 사업내용

- 매연배출 저감장치 설치를 위한 설계도면 및 내역서 작성

- 매연배출 저감장치 설치(차량 및 차고시설 내)

❍ 계약방법 : 수의계약(특허제품)

→ 지방계약법 제9조(계약의 방법), 같은법 시행령 제25조 제1항 4호

❍ 홍은119안전센터 전경

청사 전경	차고 전경

Ⅳ

향후 추진일정

설치계획 수립 ----------------------------------------- 10. 13.(금)

일상감사 의뢰(市 감사위원회) ----------------------------- 10. 13.(금)

G2B 수의시담 및 전자계약 ------------ 10. 23.(월) ~10. 24.(화)

공사 및 검수․ 대가지급 ---------------- 10. 24.(화) ~11. 24.(금)

Ⅴ

기대효과

매연배출 저감장치 설치를 통한 현장근무대원 호흡기 보호

유해가스 없는 쾌적한 근무환경 조성

자연환기, 환풍기보다 효율적인 환기시스템 확보

붙 임  1. 소방차 배기가스 배출시스템 규격서 1부.

2. 특허증 1부.  끝.

업무일몰일 : 설치 완료 및 대가 지급시