투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물(신호,안전표지판) 원인자부담공사 기간연장 승인 통보(당산역교차로주변)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울교통공사 토목1사업소-6251(2017.9.29.)호와 관련입니다.

3.  위 호와 관련하여 『교통신호기 원인자부담공사 공사기간 연장요청』에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 공사품질 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 교통안전시설물(신호등,안전표지판)원인자 부담공사

나. 공사장소 : 당산동5가 14-4 현장 주변

다. 원 인 자 : 서울교통공사 토목1사업소

라. 감 리 사 : ㈜트래픽스

마. 시 공 사 : ㈜우진신호

바. 변경내용 및 요청 : 통신온라인 정상운영 확인을 위한 연장요청

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
공사기간	2017.7.11. ~ 2017.9.30.	2017.7.11. ~ 2017.11.30.	61일 증

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	서울교통공사사장,(주)트래픽스,(주)우진신호
주무관	고두규		주무관	정경성		기전과장	10/13 박재경
협조자	주무관	김근수
시행	기전과-13421	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개