문서번호	세무과-23906
결재일자	2017.10.13.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		세무정보화팀장	세무과장
박경여		안효무	10/13 조조익
협조

「2017년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 사업」

월  간  보  고 (9월)

2017. 10

재무국

(세무과)

「2017년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 사업」

월  간  보  고 (9월)

세무종합시스템의 안정적 운영과 서비스 개선을 위해 추진하고 있는『2017년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 사업』의 9월중 주요 추진과업 내용과 10월중 추진계획에 대하여 보고함.

Ⅰ		사 업 개 요

□ 사업기간 : ‘17. 1. 4 ~ 12. 31

□ 계약업체(금액) : ㈜씨와이디 정보기술(1,310백만원)

□ 주요 사업내용

○ 응용프로그램 추가개발 및 기능개선

- 정기분 부과 검증관리․자동차세 부과업무․체납차량 번호판 영치업무 개선

- 제증명 발급관리․주민세관리․세입현계 결산관리 및 징수보고 개선

- 주민등록번호 변경정보 조회기능 및 과세자료 정비기능 개선 등

○ 응용프로그램 유지관리 및 운영

- 지방세 부과 징수업무 지원, 사용자 요구사항 반영 및 보완

- 시스템 운영 및 유지관리, 장애예방 및 장애발생에 대한 복구 등

○ 시스템 S/W 유지보수 및 기술지원

- S/W 정기점검 및 기술지원, 장애예방 및 장애발생에 대한 복구 등

Ⅱ		월간보고회의 개최

□ 일시 : `17. 10. 11.(수) 10:00

□ 장소 : 서소문별관 1동 9층 세무과 회의실

□ 참석 : 세무정보화팀 사업관련 담당자, 사업 수행사

□ 내용 : `17년 9월 과업진행 추진실적 및 10월 추진계획 등 보고

Ⅲ		주요과업 처리내용

□ 주요과업 추진실적

과업 구분		총 과업	완료과업			진행과업			잔여과업
			누적합계	9월 완료		합계	진행	지연
신규		28	18	3		6	6	0	4
보완		48	45	3		2	1	1	1
총계		76	63	6		8	7	1	5
유지관리(운영 지원 등)			1,766	224		0	0	0	0
9월 6개 과업 완료
					-SFR-003[영치] 자동차세 의무보험 연계 -SFR-004[취등록부동산] 기한후 신고기능 개선 -SFR-005[주민세]주민세 종업원분 관리개선 -MAR-022[제증명] 무관할 증명서 보완 -MAR-038[공통] 조회단축키 신설(F2) -MAR-039[공통] “표준지방세” ➜ “세무종합시스템” 으로 통일(에러 메시지 표출포함)
10월 11개 과업 진행예정
	-SFR-002[자동차세] 자동차세 사망자관리 기능 개선 -SFR-006[주민세] 사업장별 주민세 과세자료 관리 -SFR-010[제증명] 제증명발급 생활보호대상자 연계 -SFR-011[제증명] 임시납부확인서 발급기능 -SFR-012[세입현계]결산관리 기능개선 (결손금액별 집계표) -SFR-018[영치] 영치프로그램 기능개선 -SFR-026[연계관리] 연계서비스 관리 신설 -MAR-035[공통] 과거 세목명(본세,도시계획 ..)모든 UI에 세목명으로 표출 -MAR-045[취득세부동산]비과세감면 사후관리 기능개선 -CSR-004[공통] ETAX 암호화에 따른 관련 사항

따로붙임 1. 2017년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 월간보고서(9월)  1부.

2. 월간 업무현황 보고서  1부.

3. 세무종합시스템 추진 현황표(WBS)  1부.

4. 투입인력 임금지급 확인  1부.