아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	서울지방국토관리청장(하천계획과장)
(경유)
제목	2017년 국가하천유지보수사업(2차교부) 사업내용 변경 승인요청

1. 서울지방국토관리청 하천계획과-2136(2017.6.22.), 녹지관리과-4780

(2017.10.11.)호와 관련입니다.

2. 2017년 국가하천유지보수(2차교부) 세부사업중 일부 변경사항이 있어   승인 요청하니 조속한 조치바랍니다.

가. 변경내용

사업명	당초		변경		변경사유
	사업내용	예산	사업내용	예산
합계		517		517
국가하천유지보수(2차교부금)	제방사면보수	274	변경없음	274	변경없음
	제방예초	241	고수호안 사면 유실방지목 교체	241	간주처리 절차로 예산배정시기 지체되어 예초시기가 지나 치수목적인 고수호안 정비로 변경시행코자 함
	본사업 시설부대비	2	변경없음	2	변경없음

따로붙임  1. 국가하천유비보수비 집행 변경계획 1부

2. 요청공문(서울시 한강사업본부) 1부

3. 2차배정 세부내역 1부  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이평주		하천계획팀장	이승우		하천관리과장	10/13 손경철
협조자
시행	하천관리과-16102	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서도문동) 서소문청사 1동 8층(하천관리과 하천계획팀)	/
전화	02-2133-3884	/전송	02-2133-1044	/	lpj1121@seoul.go.kr	/	대시민공개