＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	강서수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	페쇄형배전반외 1종 조달구매 납품기한 연기 요청

1.  시설관리과-20824(`17.10.13.)호와 관련입니다.

2.  계약번호 22153254900호로 우리 사업소에서 시행중인 『페쇄형배전반외 1종 조달구매』에 대하여 납품기한을 아래와 같이 연기요청 합니다.

가.  구매건명 : 페쇄형배전반외 1종 조달구매

나.  구매수량 : 배전반 1식, 분전반 1식

다.  계약금액 : *******************************[계약금액 변동없음]

라.  납품기한

- 당초 : 2017. 10. 20.

- 변경 : 2017. 11. 30.

마.  예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 건물, 시설비 및 부대비, 시설비

바.  연기사유 : 지하1층 건축공사 후 배전반이 반입되어야 하므로 공사 완료 예정일(’17.11.30).까지 납품기한 연기

사.  귀책사유 : 강서수도사업소

아. : 지체상금부과 : 미부과

붙임 : 1. 납품기한 연기 보고서 1부

2. 합의서 1부

3. 관련문서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	이무규		기전팀장	문용욱		시설관리과장	10/14 고신석
협조자
시행	시설관리과-20900	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동)	/
전화	02-3146-4017	/전송	02-3146-4039	/	lmkyu@seoul.go.kr	/	부분공개(5)