아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	용역 준공기한 연기 의뢰(강변북로(서울숲 주변) 연결로 구조개선 타당성조사 용역)

1. 도로계획과-14377호(2017.10.11.)와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행 중인 “강변북로(서울숲 주변) 연결로 구조개선 타당성조사 용역”에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용  역  명 : 강변북로(서울숲 주변) 연결로 구조개선 타당성 조사

나. 계  약  자 : ㈜서우티이씨

다. 준공예정일 : (당초) 2017.10.23. → (변경) 2017.12.29.

라. 귀책  소재 : 서울특별시(지체상금 부과여부 : 미부과)

마. 연기  사유 : 연기 의뢰서(붙임1) 참조

붙임 : 1. 용역 준공기한 연기 의뢰서 1부.
2. 용역 준공기한 연기 방침서 1부.
3. 합의 각서 1부. 끝.

	도로계획과장
★주무관	김창환		도로시설계획팀장	양돈욱		도로계획과장	10/13 하종현
협조자	계약1팀장	조현
시행	도로계획과-14465	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	2133-1668	/전송	2133-1078	/	chk72@seoul.go.kr	/	대시민공개