문서번호	시설보수과-8737
결재일자	2017.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	10/16 김용제
협조

- 2017년 도로시설물 일상유지보수공사(교량,고가,입체교차로)

추가 보수물량에 대한 조치계획

2017. 10.

2017년 도로시설물 일상유지보수공사(교량,고가,입체교차로)

추가 보수물량에 대한 조치계획

우리 사업소에서 추진중인「2017년 도로시설물 일상유지보수공사」와 관련, 추가예산 배정액 및 낙찰차액, 이설비 등을 활용하여 추가 시공에 대한 전반적인 조치계획 보고임.

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 2017년 도로시설물 일상유지보수공사(교량,고가,입체교차로)

○ 공사규모

- 포장보수 38a, 교면방수 2,600㎡, 신축이음보수공 70m,

- 상판보수공 133㎡, 콘크리트 보수공 1,830㎡, 도장보수공 860㎡          - 강재보수공(점검통로및난간) 17m, 기타보수 1식

○ 공사기간 : 2017. 4. 24 ~ 2017. 12. 31

○ 도 급 자 : 이에스피건설 대표 강상수

○ 총공사비 : 1,189,028천원

(도급비:929,273천원, 관급비:100,000천원, 이전비:159,755천원)

	< 예산현황 >
▷예산배정: 1,330,000천원(도급비 1,070,245, 관급비 100,000, 이전비 159,755) ▷계약금액: 1,189,027천원(도급비 929,272, 관급비 100,000, 이전비 159,755) ▷추가배정: 170,000천원 ▷낙찰차액: 140,972천원 ▷변경금액: 1,500,000천원(도급비 1,360,245, 관급비 100,000, 이전비 39,755)

Ⅱ		공사추진현황

○ 작업 추진현황

작업지시	작 업 기 간	작 업 내 용	금액(천원)	비고
1차	2017.5.10~6.30	목동교 외 1개소 바닥판 및 차선도색	53,538	완료
2차	2017.5.17~6.30	오목교 외 3개소 시설물 보수	114,457	완료
3차	2017.5.17~6.30	오금교 외 3개소 시설물 보수	108,922	완료
4차	2017.6.09~8.14	도림교 외 14개소 시설물 보수	57,030	완료
5차	2017.7.18~8.31	오류철도고가 유도배수로 설치	42,218	완료
6차	2017.7.20~9.15	행주IC교 차량방호울타리 설치	68,934	완료
7차	2017.8.16~9.29	목동교 외 2개소 교면 소파보수	65,544	완료
8차	2017.8.18~9.29	광복교 노후포장 소파보수	17,308	완료
9차	2017.9.01~10.31	오류철도고가 코러실중방식도장	79,680	완료
10차	2017.9.26~10.31	행주1교 외 4개소 시설물 보수	45,406	완료
합계			653,037

○ 계약금액의 73%가 집행(진행작업 포함)된 상태로 현재 집행     잔액은 약 250백만원임

Ⅲ		보고내용

○ 현재 계약금액의 73%가 집행된 상태이나, 추가공사가 시급한

보수대상 물량이 있어 아래와 같이 조치코자 함

1) 여의2교 교면방수 및 포장(시외방향) 추진 (소요금액 375백만원)

☞ 체수 및 누수차단을 위한 교면방수 및 재포장

2) 광명교 신축이음장치(GUSS JOINT) 보수 (소요금액 94백만원)

☞ 조인트파손 및 이음부 누수가 발생되어 파손부 보수

3) 도림교 점검통로(B TYPE) 설치 (소요금액 196백만원)

☞ 점검통로 미설치에 따른 안전점검 소홀 등 안전감사시 지적

4) 기타 민원사항 및 시급사항 보수 (소요금액 15백만원)

5) 총 소요금액 : 680백만원

○ 보수대상 현황사진

1) 여의2교 노후포장 파손	2-1) 광명교 신축이음부 주변 파손

2-2) 광명교 하부 누수현황	4) 도림교 점검통로 미설치

○ 상기사항 보수를 위하여는 680백만원이 필요하나 현재 집행

잔액은 약 250백만원인바 430백만원이 부족한 실정임

Ⅳ		조치의견

○ 추가보수에 따른 부족예산 확보방안

- 교량안전과 추가예산 배정금액 반영 : 170,000천원

- 본공사 낙찰차액 반영 : 140,972천원

- 이전비 잔액 반영 : 120,000천원

- 계 : 430,972천원

○ 추가 보수가 필요한 물량에 대하여는 동절기 이전 작업이 완료

되도록 우선 작업지시후 시행하고 추후 설계변경시 정산처리코자 함.

끝.