문서번호	도로보수과-10905
결재일자	2017.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
심혁명		이옥휘	10/16 代천석기
협조

굴착복구 책임감리 일일보고

2017.10.14

도 로 보 수 과

분야별 건설사업관리기술자 업무일지

□ 성    명 : 박 효 근

□ 일    자 : 2017.  10. 14 (야간)

□ 근무시간 : 22 : 00 ~ (익일) 06 : 00

○ 업 무 수 행 사 항

주요업무수행내용

◇ 2017년 굴착복구공사 - 강서(22:00~익일06:00)

No	노 선	위 치	공사계획(m)		금일작업량(m)		총 연장 누계[m]	작업내용	비 고
			B	L	B	L
1	화곡로	화곡동 982-1 ~1076-1	1.5	1.300	1.7	22	1,549.2	굴착복구 아스콘 포장

- 공 사 명 : 화곡역~강서구청(화곡로)배수관 정비공사

지 시 사 항	조 치 사 항	비 고
○ 공사용 안내간판 및 노후포장공사 홍보 사전고시 ○ 교통안전시설설치 철저(보행자및차량유도) ○ 포장면 다짐 및 평탄성 관리 철저 ○ 기존포장 조인트부분 밀실 처리 ○ 작업시 최대한 민원(소음)이 최소화 하도 록 기능공에게 작업 전 주지 철저	○ 공사관련 홍보 사전고시 확인(현수막외) ○ 교통안전시설 설치 및 차량통행 확인 ○ 포장면 평탄성 관리 및 다짐상태 적정 ○ 기존포장 조인트부분 밀실 처리 확인 ○ 작업시 최대한 민원(소음)이 최소화 기능공 교육실시 ※ 참고사항	(야간)

분야별 건설사업관리기술자:  박  효  근  (인)

건설사업관리 단계별 체크리스트

○ 공 사 명 : 화곡역~강서구청(화곡로)배수관 정비공사

○ 점검위치 : 화곡로273 (해바라기 SK셀프 주유소앞)

구분			점검항목 및 내용	점검 결과
시공전			○ 공사시작 전 공사홍보 및 교통안내표지판, 공사안내현수막 설치여부	설치
			○ 일일 적정시공량 준수여부	준수
시공중	굴착		○ 교통처리(보행로, 차량통행로확보)가 계획대로 시행되는지 여부	○
			○ 야간조명(75럭스이상) 설치여부	○
			○ 주요 지하매설물 관리자의 공사현장 입회여부	-
			○ 굴착 시 컷팅(절단기)를 사용하여 포장층(20cm) 절단후 굴착하는지 여부	○
			○ 굴착토사를 현장에서 즉시 반출하는지 여부	반출
			○ 굴착규모(폭, 깊이)는 허가사항을 준수하여 시공하는지 여부	적정
			○ 굴착단면의 붕과가 우려되는 경우 사면보강 대책수립 및 시행여부	-
	되메우기	기층 이하	○ 재생골재 및 환토 되메우기 시 재료의 품질기준이 적합한지 여부	적정
			○ 다짐장비, 다짐두께, 다짐횟수는 규정된 기준에 적합한지 여부 (한층 다짐두께- 양질의모래 40cm이하, 모래이외20cm이하)	○
			○ 마무리면이 요철 없이 평탄하고 밀실하게 처리되었는지 여부	○
		기층 (혼합, 보조)	○ 기층재 포설 깊이(A-1기준 : 포장면으로부터 80cm)가 확보되었는지 여부	○
			○ 기층재의 품질기준이 적합한지여부	적합
			○ 기층재의 다짐장비, 다짐두께, 다짐횟수는 규정된 기준에 적합한지 여부 (한층다짐두께 : 20cm)	적정
			○ 마무리변이 요철 없이 평탄하고 밀실하게 처리되었는지 여부	○
	포장	중층	○ 아스팔트 혼합물의 적정온도 확인 여부(도착온도 145~160°C)	○
			○ 중층포설깊이(A-1기준 : 포장면으로부터 20cm)기 확보되었는지 여부 (중층포설시 7.5cm씩 2회 포설, 차로복구시 10cm씩 2회포설)	○
			○ 기존포장 컷팅면의 청결상태 및 유재살포 여부	○
			○ 적정유재(RSC-3)를 적정량 균일하게 살포하는지 여부(프라임코팅 : 0.5~1.0/㎡)	○
			○ 아스팔트 혼합물의 다짐(온도,장비,두께,횟수)은 규정된 기준에 적합한지 여부	적합
			○ 마무리면이 요철없이 평탄하고 밀실하게 처리되었는지 여부	○
		표층	○ 표층 포설깊이(A-1기준: 포장 면으로부터 5cm)가 확보되었는지 여부	임시포장
			○ 기존포장 컷팅면이 작업 시 파손된 경우 재 것팅작업을 시행하였는지 여부
			○ 적정유재(RSC-4)를 적정량 균일하게 살포하는지 여부(택코팅 : 0.3~0.6/㎡)
			○ 아스팔트 혼합물의 다짐(온도,장비,두께,횟수)은 규정된 기준에 적합한지 여부
			○기존포장과의 쪼인트부분의 처리가 밀실한지 여부	○
			○ 포장표면 상태 확인(평탄성 확인, 재료분리 및 블리딩 여부)	양호
시 공 후			○ 포장마무리 후 주변정리 및 물청소 실시 여부	○
			○ 포장표면의 온도가 60°C 또는 해당기관이정하는 온도까지 떨어진 이후 차량개방 여부	○
			○ 6시 교통개방여부(굴착자와 복구자의 상이한 경우 철저한 원인 규명)	○

사  진  대  지(굴착복구)

내용	교통표지설치 및 신호수배치	내용	폐기물 처리
내용	박스하월 700mm곡관 설치	내용	40cm 되메우기 다짐
내용	20cm 되메우기 및 다짐	내용	유제살포(프라임 코팅)
내용	임시포장 완료	내용	물청소

끝.