문서번호	도로관리과-16767
결재일자	2017.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		도로굴착관리팀장	도로관리과장
엄태용		오석관	10/16 배광환
협조	주무관		윤진성
	주무관		최현

동공탐사용역 공정회의(9월, 최종, 착수) 결과 보고

2017. 10.

안전총괄본부

도로관리과

동공탐사용역 공정회의(9월, 최종, 착수) 결과 보고

□ 회의개요

○ 일    시 : ’17.10.13(금) 15:00 ~ 16:30

○ 장    소 : 도로관리과 회의실

○ 안    건 : 2017년 1단계(최종), 2단계(9월) 3단계(착수보고)

○ 참    석 : 도로관리과장, 도로굴착관리팀장, 업무담당 2명

(업체) 셀파이엔씨(17-1), 지케이엔지니어링(17-2), 광성지엠(17-3)

□ 추진실적

○ 탐사실적(’17.9.30 기준)

구분	계획연장	탐사연장	분석연장	분석동공	제척(GPR)	천공	동공발견	적중률
계	1,985㎞	1,369㎞	1,161㎞	901	138	732	602	82.2%
1단계	980㎞	980㎞	980㎞	794	129	665	546	82.1%
2단계	540㎞	389㎞	181㎞	107	9	67	56	83.6%
3단계	465㎞		(10.13.	착수)

□ 공정회의 주요내용

○ 공통

- 천공결과 동공 미발견 사례에 대하여 원인분석 후, 결과를 공유하여 기술향상에 노력

- 탐사구간에서 발생한 함몰원인 분석

- 동공시험 모니터링 시험중 긴급등급으로 진행된 경우 즉시 복구토록 조치

- 포장지지력 평가 관련 사항은 서울시 동공관리 등급과 연계하여 검토 필요

- 유전율은 포장재료에 따라서도 변동이크므로 향후 포장재료 고려하여 시험

○ 1단계 추진실적 및 최종보고 관련

- 동공발견 목표 달성

- 준공전 종합보고서, 동공조사서 등 오류 사항검토 확인

- 추가과업 내용 보완

※ 유동화 채움재 시험시공비용 관련 의견 추가

○ 2단계 추진실적 관련

- 금년내 천공작업 완료

- 공정지연의 우려가 있으니 천공팀 추가 투입 검토

- 천공작업은 도로상 사고위험 요소가 많으므로 현장 안전관리 철저

○ 3단계 착수보고 관련

- 계약 기간내 과업이 완료 될 수 있도록 실행계획을 수립

- 공정관리를 위하여 장비 및 인력 구성 검토 철저

- 천공작업은 도로상 사고위험 요소가 많으므로 현장 안전관리 철저

- 추가과업 수행에 시간이 많이 소요되므로 조기 추진

별도 : 보고자료 3건(출력물).  끝.