준공기한 연기보고서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	강철운	이준호	10/17 김홍준

	명에 의거 “2017년 은평구관내 상수도공사” 급수공사 시행중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.
2017. 10.
복명자 : 직 지방시설서기보 성명 : 강 철 운

복 명 내 용
건 명	준공기한 연기보고서(신설-189, 녹번동 134-5)
내용	1. 공사위치 : ****************** 2. 작업지시번호 : ****** 3. 급수공사 종별 : 급수공사 공동신규 4. 보고내용 - 상기 위치에 급수공사 작업지시 하였으나, 수요가 사정(공사지연으로 비계철거 후 공사원함)으로 인한 공사연기원이 접수되어 기한내 공사완료가 불가능한 실정임. 5. 조치의견 - 상기위치의 급수공사 기한을 아래와 같이 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다. ◆ 당초 공사기간 : 2017.10.11 ~ 2017.10.21. 변경 공사기간 : 2017.10.11 ~ 2017.10.30.
비 고	신청인(현장대리인):********************

끝.