문서번호	급수운영과-27559
결재일자	2017.10.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
박경원		이상무	10/17 김정수
협 조

단수작업 계획서

(상수도관 이설공사)

2017. 10

강서수도사업소

(급수운영과)

「고척동 133-39호 앞 상수도관 이설공사」

단수작업 계획서

구로구 고척동 133-39번지 D80mm 상수도관 이설공사와 관련하여, 구간 내 단수작업 계획을 아래와 같이 보고합니다.

2017.  10.  17.

보고자 : 시설7급  성명  박 경원

□ 공사명 : 2017년 고척1동외 7개동 상수도공사(단가계약)

◦ 위    치 : 구로구 경서로5길(고척동 133번지 일대)

◦ 공사개요 : 상수도관 이설공사

□ 단수일시(단수세대)

◦ 2017.10.18.(수) 오전 09:00부터 ~ 오후 17:00까지 (8세대)

□ 공사 상세도

□ 단수소요 시간

작 업 계 획	소 요 시 간	비 고 (산출근거)
제수밸브개폐	30분	D80mm*1, D100mm*1 개소
퇴 수	30분	D100mm
기존관 절단	60분	기존관 D80mm 4개소
배 관	180분	D=80mm, L=20m
제수밸브설치	60분	D100mm*1개소
세척 및 통수	120분	D100mm 퇴수밸브 이용
합 계	8시간 00분

□ 자재준비 계획

번호	품 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	타이튼직관 (에폭시)	80	본	4
2	KP 소켓곡관	80*45	개	4
3	KP 이음관	80	개	5
4	KP 소켓플랜지 T형관(B형)	80*80	개	1
5	플랜지편락관(A형)	80*100	개	1
6	제수밸브(소프트)	100	개	1
7	이탈방지 압륜	80	조	15
8	소화전철개 및 지하식소화전	원형648, 지하식 단구		재용

□ 장비확보 계획

번호	장 비 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	백호	0.18	대	1
2	관절단기		대	2
3	도로캇타기		대	1
4	양수기	50mm	대	2
5	램머기		대	1

□ 인력확보 계획

구 분	성 명	주 소	주민등록번호	서울시교육 및 자격증소지여부(용접공)
계	4
***	***	*******************	**************	**************
***	***	**********************	**************	**************
****	***	********************	**************	**************
****	***	*********************	**************	**************

□ 수계조정 및 퇴수작업계획

◦ 수계조정 계획 : 해당없음

◦ 퇴수작업 계획

- 퇴수잔량 산출 : D= 80~100㎜,  L= 120m,   Q= 0.75㎥

총퇴수량 = 1.75㎥(적수발생시 추가 퇴수 실시)

□ 아파트 등 다량급수처 인입밸브 개ㆍ폐 담당자 지정 : 해당없음

□ 도로굴착 허가 및 교통관리계획 협의

◦ 관계기관 공문발송 및 승인 현황 : 굴착승인 및 교통관리계획(경찰서) 허가 완료

□ 담당 및 시공업체 연락

구 분	책 임 자	전 화
담 당 (시행부서)	감독자 : 급수운영과 박경원	☎ 3146-3967
업 체	회 사 명 : 세화건설, 대표 : 김장원 현장소장 : 노재만	HP *************

□ 시험굴착 계획

◦ 2017. 8.31. 시험굴착 확인

- 관경 : D80mm,   - 심도 : 관상단 1.2m

□ 공사장에 대한 안내간판 및 안전시설 설치

◦ 공사안내간판, 현수막

◦ 휀스, 라바콘 휀스

◦ 교통안내원 배치 등

붙 임. 단수안내문 1부.  끝.