문서번호	물재생시설과-15107
결재일자	2017.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	물재생운영팀장	물재생시설과장		물순환안전국장
박만헌	정훈모	이철해		10/17 권기욱
협 조
	주무관		최정윤

준공기한 연기 보고

(차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 용역)

2017. 10

물순환안전국

(물재생시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

용역 준공기한 연기 보고

(차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 용역)

『차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 용역』의 효율적인 과업

수행을 위한 용역 준공기한 연기 보고임.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 용역

○ 계 약 자 : ㈜ 이산 외 2개사

○ 계약금액 : 1,465백만원

○ 용역기간 : 2016. 4.15. ~ 2017. 10. 11

○ 주요과업내용

-  차집관로 기본 및 실시설계(1.5Q 미만) 11.2Km , 기타

-  현장 조사 및 측량 후 조사자료 분석 및 지표 설정

-  경제성 등 타당성 분석 등

□ 용역 추진사항

○ ’16.  4 : 용역 계약 · 착수

○ ’16.  6 : 용역 착수 보고

○ ’16. 12 : 외부 자문회의, 1차 기성(560백만원)

○ ’17.  3 : 투자심사 시행(개봉유수지)

○ ’17. 10 : 2차 기성(540백만원)

□ 준공기한 연기

○ 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경
기 간	’16. 4. 15. ~ ’17. 10. 11	’16. 4.15. ~ ’17.12.31.

○ 계약금액 : 변동없음(지체상금 미 부과)

○ 연기사유 : 시 예산 사정에 따른 용역비 미확보로, 잔여 설계를 위한 기간 소요에 따른 용역 준공기한을 연기하고자 함

□ 향후 일정(안)

○ ‘17. 10 : 변경계약(준공기한 연기) 의뢰(재무과)

○ ‘17. 12 : ’18년 예산 확정

○ ‘18.  1 : 준공기한 연기

○ ‘18.  6 : 용역 준공

붙임 : 준공기한 연기의뢰서 1부. 끝.