＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	영등포아리수정수센터
수신자	정수시설과장
(경유)
제 목	변경계약체결[1정수장 활성탄지 퇴수밸브 교체공사]보고 및 통보

1. 정수시설과-9750(2017.10.17.)호와 관련입니다.

2. 위 계약의뢰 건에 대하여 아래과 같이 변경계약체결 되었음을 알려드립니다.

가. 건   명 : 1정수장 활성탄지 퇴수밸브 교체공사

나. 변경사유 : 신규공종 발생 및 물량 증.감에 따른 설계변경

다. 변경내역

당 초			변 경			비고
계약체결일	계약기간	계약금액(원)	변경계약 체 결 일	계약기간	계약금액(원)
2017.4.17	2017.4.21.~ 2017.10.17	101,353,550	2017.10.17	2017.4.21.~ 2017.10.17	96,459,000

붙 임 : 계약체결서류 1부.  끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	박소현		행정관리과장	안창수		영등포아리수정수센터소장	10/17 이성락
협조자
시행	행정관리과-12025	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 영등포아리수정수센터	/
전화	3146-5611	/전송	3146-5691	/	jungeunpk@seoul.go.kr	/	부분공개(5)