문서번호	급수운영과-18682
결재일자	2017.10.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
고태우		10/18 박희철
협 조

현장 실정보고 (서울대진초등학교외 16개소 아리수음수대 배관설치공사)

2017년 10월

급수운영과

현장실정보고(서울대진초등학교외 16개소 아리수음수대 배관설치공사)

우리사업소에서 시행중인 「서울대진초등학교외 16개소 아리수음수대 배관설치공사」와 관련하여 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울대진초등학교외 16개소 아리수음수대 배관설치공사

○ 위    치 : 강남구 개포동 서울대진초등학교외 16개소

○ 공사기간 : 2017.05.30. ~ 2017.10.26.

○ 도 급 비 : ************

○ 시 공 사 : ************

□ 보고사항

○ 배관 구경 및 연장 변경

▶ 서울대진초등학교

- 급수배관(D15mm) 연장 변경 (60m→70m)

- 급수배관(D25mm) 연장 변경 (150m→200m)

- 배수배관(D30mm) 연장 감소 (50m→0m)

※ 당초 설계보다 시공연장 증가

※ 기존 정수기에 쓰던 배수배관 재사용으로 미시공

▶ 역삼중학교

- 배수배관(D30mm) 연장 감소 (60m→15m)

※ 당초 설계보다 시공연장 감소

▶ 압구정초등학교

- 급수배관(D15mm) 연장 변경 (60m→70m)

- 급수배관(D25mm) 연장 변경 (150m→160m)

- 배수배관(D30mm) 연장 감소 (60m→15m)

※ 당초 설계보다 시공연장 증가,배수관 시공연장 감소

▶ 단국공업고등학교

- 급수배관(D15mm) 연장 변경 (60m→250m)

- 급수배관(D25mm) 연장 변경 (60m→110m)

※ 학교측의 요청으로 기존 배관에서 분기가 아닌 기계실에서부터 새로 전용배관을 부설하여 설계보다 시공연장 증가

▶ 밀알학교

- 급수배관(D15mm) 연장 감소 (70m→45m)

- 급수배관(D25mm) 연장 감소 (80m→50m)

- 배수배관(D30mm) 연장 감소 (70m→18m)

※ 학교측의 음수대 설치대수 감소요청으로 인해 시공연장 감소(붙임 참고)

▶ 세명초 병설유치원

- 급수배관(D15mm) 연장 변경 (5m→130m)

- 급수배관(D25mm) 연장 변경 (0m→70m)

- 배수배관(D30mm) 연장 감소 (5m→0m)

※ 기존 설계시에 세면대 아래에서 분기하여 사용하는 것으로 설계하였지만 학교측의 전용배관부설 요청에 따른 시공연장 증가.(붙임 참고)

※  배수배관은 기존 정수기에 사용된 배수관 재사용으로 미시공

▶ 도성초등학교 공사 취소

※ 건물신축시 자체적으로 배관공사 시행하여 음수대 설치

▶ 경기고등학교 공사 취소

※ 학교측의 사정으로 인해 공사 취하(붙임 참고)

▶ 압구정 주민센터 공사 취소

※ 주민센터측의 요청으로 인해 공사 취하(붙임 참고)

▶ 로봇고등학교 공사 취소

※ 학교측의 요청으로 인해 공사 취하(붙임 참고)

▶ 대현초등학교 공사 취소

※ 자체적으로 배관공사 완료하여 음수대 설치

▶ 국악고등학교 공사 취소

※ 학교측의 음수대 취소요청으로 인해 공사 취하(붙임 참고)

▶ 역삼중학교 제외 나머지 학교 기존 콘센트에서 음수대를 설치하여 전기공사 물량 감소

- 합성수지제 전선관배관 물량감소(305m→80m)

- 콘센트 설치 물량감소(기존 80개 → 7개)

▶ 협소구간 특별인부 신규공정 추가

※ 배관 설치시에 현장공간이 협소하여 작업에 어려움이 발생한 바 협소구간 특별인부 신규공정을 추가(역삼중,압구정초,단국공고,밀알학교,대진초)

□ 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 변경사항에 대하여 현장여건을 고려하여 시공후 설계변경을 시행하고자 합니다.

붙임 : 학교 측 아리수 음수대 설치 취소요청 공문.  끝.