＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	중부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사실정보고 검토결과 통보

1. 공사감독2처-11873(2017.10.18)호와 관련입니다

2. 위호와 관련 귀 공단에서 위탁감독중인 “한남테니스장~동국대입구역 송배수관 정비공사”에 대한 공사실정 보고서를 검토하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 공사준공에 차질이 없도록 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 보고내용 및 검토의견

시설관리공단 실정 보고	사업소 검토의견
잔토처리장 변경 - 위 치 : **************** - 운반거리 : 46.6km - 정산반영 : 당초 계약운반거리(45.6km) 적용	검토결과 : 타당함 - 잔토처리장 변경 및 당초 계약운반거리 적용

끝.

	중부수도사업소장
★주무관	이상현		주무관	유명수		급수운영과장	전결 10/18 유용일
협조자
시행	급수운영과-23424	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	3146-2189	/		/	부분공개(6)